투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경 시행(2회, 정산) 2020년 도로 및 교통부속물 유지보수공사(연간단가)

1. 우리사업소에서 시행하는 『2020년 도로 및 교통부속물 유지보수공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(2회,정산)을 시행코자 합니다.

가. 공  사  명 : 2020년 도로 및 교통부속물 유지보수공사(연간단가)-북부

나. 공 사 기 간 : 2020. 03. 25. ~ 2020. 12. 31.

다. 계 약 금 액 : 금351,520,140원

라. **********************

마. 설계변경(정산)내역

구 분		설계변경 금액(원)		증 ․ 감(원)	비 고
		당 초	변 경
총공사비		448,450,000	447,790,000	감) 660,000
도급비	공 급 가 액	319,563,764	369,400,000	증)49,836,236
	부가가치세	31,956,376	36,940,000	증) 4,983,624
	계	351,520,140	406,340,000	증)54,819,860
관급자재비		72,929,860	31,450,000	감)41,479,860
이전비		24,000,000	10,000,000	감)14,000,000

바. 설계변경사유 : 공종별 물량 증·감에 따른 설계변경

사. 예산과목

- (일반회계)안전총괄본부 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물관리. 도로부속물 일상 유지관리, 시설비및부대비, 시설비(336,000,000원)

- (교통사업특별회계)도시교통부 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물관리, 교통안전관련 도로부속물유지관리, 시설비및부대비, 시설비(112,450,000원)

붙임  1. 설계변경사유서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 제비율 검증표 1부.  끝.

5. 설계변경 검토 보고서 1부.  끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	황태선		도로보수과장	이화신		북부도로사업소장	12/10 고영준
협조자
시행	도로보수과-11365	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913 도로보수과 (번동)	/
전화	02-944-5436	/전송	02-945-5072	/		/	부분공개(5)