문서번호	사회적경제담당관-15331
결재일자	2020. 12. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		사회적경제기반조성팀장	사회적경제담당관
지관우		代지관우	12/10 고광현
협조

개봉 사회적경제 클러스터 조성공사

관급자재 납품기한 연장계획

2020. 12.

사회적경제담당관

개봉 사회적경제 클러스터 조성공사

관급자재 납품기한 연장계획

개봉 사회적경제 클러스터 조성공사를 위한 관급자재 구입품목에 대하여 공사일정에 맞춰 납품기한을 연장하고자 함.

□ 사회적경제 클러스터 관급자재(건축) 납품연기

○ 계약개요

가. 건  명: 사회적경제 클러스터 조성공사 관급자재(건축) 구매

*****************

***********************************

라. 계약체결일: ’20. 11. 13.

마. 납품요구일: ’20. 11. 13.

바. 납품 기한: ’20. 12. 20.

○ 납품기한 연장

가. 연기기한 : ’21. 2. 28.

나. 연기사유 귀책소재 : 서울시

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유 : 공사시기 미도래에 따른 납품기한 연기

□ 사회적경제 클러스터 관급자재(기계) 납품연기

○ 계약개요

가. 건  명: 사회적경제 클러스터 조성공사 관급자재(기계) 구매

*******************

***********************************

라. 계약체결일: ’20. 11. 13.

마. 납품요구일: ’20. 11. 13.

바. 납품 기한: ’21. 1. 12.

○ 납품기한 연장

가. 연기기한 : ’21. 2. 28.

나. 연기사유 귀책소재 : 서울시

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유 : 공사시기 미도래에 따른 납품기한 연기

□ 향후계획

○ 납품 변경 의뢰 (→재무과)	: ‘20.12.11.

○ 물품검수	: ‘21. 2.

붙임: 1. 변경의뢰서 및 합의각서 1부.  끝.