“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신자	행정지원과장
(경유)
제 목	납품기한 연기 요청(중블록 유량계 설치)

1. 시설관리과-24299호(2020.12.10.)와 관련 우리사업소에서 시행중인『재구축 중블록 유량계 설치』건의 납품기한을 아래와 같이 연기 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 사업명 : 재구축 중블록 유량계 설치

나. 계약현황

품 명	계약번호	계약상대자	금액(원)	비 고
유량계	제00-18-8-0181-17호	*****	**********

다. 납품기한

- 당초 : 2020. 12. 16.

- 변경 : 2020. 12. 23.

라. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비, 시설비(21102)

마. 연기사유 : 유량계 종류 변경에 따른 제작기간 소요로 납품기한 연기

바. 귀책사유 : 강서수도사업소

사. 지체상금부과 : 미부과

붙 임 : 1. 보고서 1부

2. 합의서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	이한수		기전팀장	양창진		시설관리과장	12/10 유명은
협조자
시행	시설관리과-24301	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	3146-4023	/전송		/		/	부분공개(6)