문서번호	기전과-7252
결재일자	2020. 12. 10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
강혜지		代김학민	12/10 代김학민
협조

『서울숲1,2지하차도 CCTV 통신공사』

설계변경 검토보고

2020. 12.

성동도로사업소

(기 전 과)

『서울숲1,2지하차도 CCTV 통신공사』

설계변경 검토 보고

『서울숲1,2지하차도 CCTV 통신공사』의 당초 계약내역에 변동사항이 생겨 아래와 같이 설계변경코자 검토보고 드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서울숲1,2지하차도 CCTV 통신공사

○ 계약금액 : ************

○ 계 약 일 : 2020. 11. 04.

○ 착 공 일 : 2020. 11. 11.

○ 준공기한 : 2020. 12. 10.

○ 공사내용 : 케이블(전원, UTP, 광) 및 배관(플렉시블, 강제) 설치

○ 계약업체 : ******************

□ 설계변경 내역

○ 설계변경 사유

- SK브로드밴드 통신 연결을 위한 케이블 및 배관 추가공사

- 보험료(건강, 연금, 노인장기요양보험) 증빙서류 미제출

○ 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분		변 경 전	변 경 후	증 , 감	비 고
도급비	공급가액	**********	**********	************
	부가가치세	*********	*********	*************
	햡 계	**********	**********	************

○ 주요 변경 내역

(단위 : 원)

연번	내 용	규 격	단 위	내 역		공사비 (증,감)
				변경전	변경후
1	금속상자	400×400×300	개	4	3	**************
2	전원케이블	F-CV 2.5*3C	m	361	411	**************
3	광케이블	SM, 8Core	m	361	411	**************
4	강제전선관	28mm	m	466	516	*************

○ 보험료 정산

(단위 : 원)

구 분		변 경 전	변 경 후	증 , 감	비 고
보험료	건강보험	*******	*	************
	연금보험	*********	*	************
	노인장기요양보험	******	*	************

○ 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로터널 노후 방재시설 보수, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 보고자 의견

○ 변동내역에 의거 설계변경을 시행하여 공사추진에 철저를 기하고자 함

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 제비율검증 확인서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.