“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(계측관리과장)
(경유)
제목	수도계량기 교체공사 추진현황 자료 제출

1. 계측관리과-11156(2020.12.09.)호와 관련입니다.

2. 상기 호와 관련 우리사업소 수도계량기 교체공사 추진현황 자료를 다음과 같이 제출합니다.

가. 계약현황

계약일	계약금액 (원)	계 약 수 량 (개)
		계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm
‘20.07.28.	220,396,000	9,986	8,699	540	196	287	234	30

나. 추진현황

준공일	준공금액 (원)	교 체 수 량 (개)
		계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm
‘20.11.24.	163,867,000	7,162	6,348	333	122	196	153	11

다. 미교체 사유별 현황

미 교 체 사유 (개)
계	공사 전 교체	부재	노후앵글밸브	위치불명	기타
2,824	637	683	1,323	179	2

라. 미 교체 계량기 교체방안에 대한 의견

- 일반 시공사는 수도계량기 교체 경험이 많은 인력을 구하기 어렵고 정해진 시         간에 처리하기에는 빠듯하므로, 다년간 수도계량기 교체 경험이 있고 노하우가        있는 서울시설공단을 활용하면 더 수월할 것으로 판단됨.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	김동건		현장민원과장	12/10 代고승석
협조자
시행	현장민원과-19110	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935(번동) 북부수도사업소 현장민원과	/
전화	02-3146-2910	/전송	02-3146-2929	/	dgeonk@seoul.go.kr	/	부분공개(5)