아름다운 변화, 열린 구정, 행복도시 서대문
		서대문구
수신자		내부결재
(경유)
제목	설계변경(최종-정산) 시행[2020년 도로굴착복구공사(연간단가)]

우리 구에서 시행중인 『2020년 도로굴착복구공사(연간단가)의 설계변경(최종-정산)을 시행 하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2020년 도로굴착복구공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2020. 3. 16. ~ 2020. 12. 31

다. 예산과목

1) 토목과, 도로인프라 확충·정비, 도로기능복구, 도로굴착복구공사, 시설비

및 부대비, 시설비(도로굴착복구기금)-(도급 ************, 관급 **********)

2) 도로인프라 확충·정비, 보도 및 시설물유지관리, 관내 도로지하공동 탐사

용역 및 복구공사, 시설비및 부대비, 시설비(구비)-(도급 **********)

라. 설계변경 사유

- 유관기관 굴착복구의 물량 및 불량 노후 도로정비에 따른 공종별 계약물량 증·감

마. 설계변경 금액                                                (단위 :원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비고
총 공 사 비		************	************	**************
도 급 비	공급가액	************	************	**************
	부 가 세	***********	***********	**************
	계	************	************	**************
관급자재비		************	***********	**************

붙임 : 1. 설계변경 검토보고서 및 계약금액조정 검증확인서 1부.

2. 설계서(갑지) 및 설계변경 내역서 각 1부.

3. 설계변경 사유서 및 설계변경 합의각서 각 1부. 끝.

★주무관							김두수			도로굴착팀장					강성무					토목과장					김귀용						안전건설교통국장					12/10 이경우
협조자				주무관						김솔					주무관							정경자					계약팀장								이향란
재무과장							박춘식			기획재정국장					임근래
시행			토목과-17281									(						)		접수													(					)
우	03718					서울특별시 서대문구 연희로 248															/			http://www.sdm.go.kr
전화		02-330-1771						/전송			02-330-1615					/	dusu@seoul.go.kr														/	부분공개(6)