투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	변경계약 의뢰[동부간선도로 3공구(방음벽구간 등) 통신공사(총차, 3차)]

우리 본부에서 시행 중인「동부간선도로 3공구(방음벽구간 등) 통신공사」에 대해 아래와 같이 변경 계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 동부간선도로 3공구(방음벽구간 등) 통신공사(총차, 3차)

나. 공사금액 : ***********************************

다. 공사기간 : ***************************************************

라. 시 공 사 : 제일정보통신㈜  대표자 허영근

마. 변경계약 의뢰 현황                                                [단위: 원]

구 분		당 초	변 경	증 · 감
총 차	계약금액	*************	*************	******************
	계약기간	**********************	**********************	*****************
3 차	계약금액	*************	*************	******************
	계약기간	*********************	*********************	*****************

바. 변경사유

- 금액변경 : 현장여건 반영에 따른 설계보완, 유지관리기관 요청사항 반영 등

- 기간변경 : 선행공종(토목공사) 준공기한 연기에 따른 후속공종(통신공사) 연기

사. 예산과목 : 도로건설, 광역도로건설, 동부간선도로 확장(녹천교~의정부시계), 시설비

붙 임  1. 검토 보고서 2부.

2. 변경 내역서 1부.

3. 합의각서    1부.  끝.

	설비부장
주무관	김수진		시책사업과장	이종근		설비부장	12/10 이달영
협조자
시행	설비부-19865	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8646	/전송	02-3708-8659	/	tnwls0169@seoul.go.kr	/	부분공개(5)