실정보고 검토서

공사명

퇴계로(2단계) 보행친화공간 재편공사

공사개요

· 위 치 : 퇴계로2가~광희동사거리

· 규 모 : 보행환경 개선 L=1.5km

· 공사기간 : ‘19.08.~‘20.12.

· 도 급 비 : 3,851백만원

· 시공사 : ㈜광혁건설

· 감리단 : ㈜이산

· 설계사 : ㈜서우TEC

실정보고 건명

규제심의 결과 유턴차로 재설치 보고

실정보고

사유

설계상 보도확장으로 충무로역 필동주유소 앞 유턴차로를 없애도록 되어있으나, 필동 주민(집단민원)들의 요구로 자전거 도로를 없애고 유턴차로를 재설치코자 보고드림

건설사업관리단

검토의견

- 경찰청(서), 보행, 자전거 정책과, 도로교통 공단 등 현장 합동

회의 및 규제결과 유턴차로 재설치로 검토완료

공기증감

0 개월

변경(안)

구분	당초	변경	비고(증감)
**	*******	********	*
***** ****	*	********	**********

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ○ ) : 증)11,599천원

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

교통규제심의 완료

발주처

검토의견

건설사업 관리단의 검토의견이 타당하여 승인조치하고 추후 설계변경에 반영하고자 함.

비 고

※ 유턴차로 설치시 3개차로 확보 필요

결재

담당

노순재

과장

장종환

부장

12/11

김용제