“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	뚝도아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	지연배상금 부과 결정

1. 정수시설과-8274(2020.12.11.)호와 관련입니다.

2. 물품계약 건과 관련, 납품지연으로『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에관한법률시행령 제90조』및『지방자치단체 입찰 및 계약집행기준』에 의거하여 계약상대자에게 지연배상금을 부과하고자 합니다.

가. 계약현황

***************************************

*********************************

- 계약금액 : 261,360,000원

- 계약일자 : 2020. 06. 03

- 납품기한 : 2020. 11. 30

- 납품일자 : 2020. 12. 05

- 검사완료일 : 2020. 12. 07(성적서 제출, 검사요청 및 검사완료일)

나. 지연배상금 부과 결정액 : 1,463,610원

- 지연배상금 : 계약금액X지체일수X지연배상금률(0.8/1000)

금261,360,000원X7일X0.08%=1,463,610원(원단위절사)

※ 지연배상금 관련 규정 : 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제15장 제7절 1. 라. 2)

‧ 납품기간을 지나서 물품과 검사서류를 제출한 때에는 납품기한의 다음날부터 검사에 합격한 날까지의 기간을 지체일수에 산입한다.

다. 납부방법 : 잡수익 고지서에 의거 납부

라. 세입과목 : 상수도사업수익, 영업외수익, 기타영업외수익.

붙임 : 1. 물품계약서 1부

2. 지연배상금 부과 의뢰 1부

3. 물품검수조서 1부

4. 검사검수요청서 1부.

5. 물품계약 지연배상금 관련 규정 1부.  끝.

주무관	김효영		행정관리과장	박진기		뚝도아리수정수센터소장	12/11 김중영
협조자
시행	행정관리과-12369	(		)	접수		(		)
우	04519	서울특별시 성동구 왕십리로 27 (성수동1가 642-1)	/
전화	3146-5512	/전송	3146-5508	/	khy5912@seoul.go.kr	/	부분공개(5)