문서번호	시설관리과-29463
결재일자	2020. 12. 11.
공개여부	부분공개(4)
방침번호

				시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장		중부수도사업소장
이승환	유세종	김상웅		12/11 박종진
협 조
	주무관		신국재

민사소송 종결에 따른 조치 계획

2020.12.

중부수도사업소

민사소송 종결에 따른 조치 계획

`19년 우리사업소에서 시행한 「*********************************」와 관련하여 서울시를 피고로 접수된 민사소송(추심금)의 종결 및 판결금 청구 요청에 따라 처리 계획을 보고드림

※ 관련근거

○ 법률지원담당관-20603(2020.12.07.)호 : **********

○ 법무법인 세광-제2020-132(2020.12.03.)호 : *********

□ 공사현황

○ 공 사 명 : **********************************

○ 공사개요 : 당초 - D15㎜~300㎜, L=1,626m,

변경 - D15㎜~300㎜, L=1,130m

○ 공사기간 : 2019.04.09. ~ 2019.12.10.

○ 도 급 액 : 당초 – 금 ***********원 / 변경 – 금 ***********원

○ 계 약 자 : **************

○ 감 독 청 : *******************

□ 민사소송 개요

○ 사  건  명 : **************************

○ 당  사  자 : ****************

○ 소송물가액 : ***********

○ 인용  금액 : ***********

○ 판결선고일 : 2020.11.12.

○ 판결송달일 : 2020.11.16.

○ 판결  결과 : ********

○ 민사소송 제기 사유

- 원고 ***는 2017년 서울시(중부수도사업소)와 ******이 계약한 ‘**************************************’에 장비를 임대하였으며, 장비임대료가 체불됨에 따라 민서산업개발을 피고로 양수금 청구 소송을 제기하여 ******가 승소함(2019.12.19. 확정됨)

- 이후 ******는 2019년4월 중부수도사업소와 ******이 계약한 ‘*********************************’(이후 ‘해당 공사’)에 채권자로서 채권압류 및 추심명령을 신청하여 지급을 요청하였음

- 서울시(중부수도사업소)는 2019.06월~11월까지(5월분~10월분) 해당 공사의 노무비 및 장비, 자재대금인 ***********원을 대금e바로 시스템을 통해서 지급하였음

- 2019.12월 최종 준공금액은 ***********원(최초 계약금액 ***********원)으로 확정되었고, 서울시(중부수도사업소)는 준공 당시 미지급 공사대금 채권액인 ***********을 서울북부지방법원 공탁소에 공탁하였음

- 이에 *******는 2020.02월 서울시를 피고로 하여금 추심금(**********원) 전액을 지급할 것을 요구하는 민사소송을 제기함

□ 민사소송 추진 경위

○ 민사소송 접수 : 2020. 2월 **************************

- ******************

○ 법률지원담당관-11324(2020. 7. 8.)호 - 민사소송 대리인 지정

- 기획조정실 법률지원담당관 ******** 외 3인

- 중부수도사업소 시설관리과 ******** 외 1인

○ 법률지원담당관-15510(2020. 9. 21.)호 - 민사소송 진행상황 통보

- 1차 변론기일 : 2020. 9.10. 16:40 변론

- 원고

▶원고 대리인 : ******************** 출석

▶소장, 2020.06.04. 준비서면 각 진술(갑 제1호증 내지 제3호증)

- 피고

▶우리시 대리인 : 법률지원담당관 *** 출석

▶2020.03.23.자 답변서, 2020.06.24.자 준비서면 각 진술(을 제1호증 내지 제5호증)

- 다음 변론 기일 예정사항 : 재판부의 법리 검토 등 판단을 위한 추가 준비서면 제출예정

○ 법률지원담당관-17358(2020.10.19.)호 - 민사소송 진행상황 통보

- 2차 변론 : 2020.10.15. 11:00 변론(종결)

- 원고

▶원고 대리인 : ******************** 출석

▶2020.10.14.자 준비서면 진술

- 피고

▶우리시 대리인 : 법률지원담당관 *** 출석

▶2020.10.12.자 준비서면 진술

- 변론 종결, 차 회 판결선고 예정

○ 법률지원담당관-19248(2020.11.16.)호

- 민사소송 판결문 접수에 따른 항소의견 등 자료제출 요청

- 판결 선고일 : 2020.11.12.(목) [*********]

- 판결문 송달일 : 2020.11.16.(월)

- 항소기한 : 2020.11.30.(월)

○ 중부수도사업소 시설관리과-27464(2020.11.19.)호 – 민사소송 판결문 접수에 따른 질의 요청

- 항소할 시 실익 여부

- 항소 포기할 시 청구금액 및 지연손해금, 소송비용 지급할 금액 및 지급 절차 등

- 준공 시 도급자에게 미지급하고 집행공탁한 공사대금 **********원의 회수 가능 여부 및 절차 등

○ 본부 기획예산과-12875(2020.11.20.)호 – 항소 관련 질의사항 회신

**********************************

**********************************************************************

***********************************************************************************

*************************************************************

○ 중부수도사업소 시설관리과-28084(2020.11.27.)호 – 민사소송 항소의견 제출

******************

○ 법률지원담당관-20603(2020.12.07.)호 – 민사소송 종결통보

- 판결 확정일 : 2020.12.01.

- 종국 결과 : ************

- 판결 주문 :

************************************************

*****************************

******************

*****************

○ 법무법인(유한) 세광-제2020-132(2020.12.03.)호 – 판결금 청구의 건

- 판결금 내역 :

*******************

********************************************************

- 2020.02.22.부터 2020.12.02.까지 연12% 비율로 계산한 지연손해금

********************** (우리사업소에서 지급)

4. 소송비용액(본부 법률지원담당관실에서 지급) :

- 약 *************************

○ ***** 미지급되고 우리사업소에서 서울북부지방법원에 공탁한 금액 *********** 중 원고인 **********************************은 2020.12.04. 원고 문창규 측에게 지급됨

○ 최종 지급할 금액 : ************************************************

□ 판결금 지급 계획

○ 원고측 총 청구액

- 원금 : ************************************************

- 이자(지연손해금) : **********    (∴원금 + 이자 = ***********)

- 소송비용액 : ***********

○ 위 청구액에서 “원금 + 이자”*************은 우리 사업소에서 지급하며, “소송비용”************은 본청 법률담당관실에서 지급할 예정임

○ 우리 사업소에서 원고에게 지급할 금액 중 원금 ***********에 대해서는 해당 공사 계약상대자인 **********에게 별도 납부 청구할 예정임

□ 추후 계획

○ 상수도사업본부 기획예산과에 원금 및 이자 금액 지급 관련 문의 후 원고에게 청구액(***********) 지급

○ 채무자(******)에게 우리사업소에서 대납하는 원금 *********** 납부 청구하여 회수 종용

○ 본청 법률지원담당관실에 소송비용 지급 의뢰

붙임 : 1. 소송관련 공문 등 서류 각 1부.

2. 판결문 1부.

3. 원고측 판결금 청구서류 1부.  끝.