문서번호	급수운영과-19296
결재일자	2020. 12. 11.
공개여부	부분공개(8)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
이승우		12/11 최춘근
협조

현장 실정 검토 보고

(테헤란로 장기사용 송배수관 정비공사-5차)

2020. 12.

강남수도사업소(급수운영과)

현장 실정 검토 보고

(테헤란로 장기사용 송배수관 정비공사-5차)

『테헤란로 장기사용 송배수관 정비공사』와 관련하여 감독처인 서울시설공단으로부터 현장 실정보고서가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

【관련문서: 공사감독2처-19824(2020.12.07.)】

공사개요

□ 공 사 명: 테헤란로 장기사용 송배수관 정비공사

□ 공사기간: ***********************

□ 공사개요: D=200~800mm, L=1,838m

□ 도 급 액: **************

□ 도 급 자: **************

서울시설공단 요청내용

□ 역삼동 강남대로 ~ 테헤란로간 (D=800mm, L=1650m), 야간공사

□ 작업시간 축소에 의한 노임할증 추가 반영

- 현황 및 문제점

․ 상기공사 도로공사신고를 위해 관할경찰서인 강남경찰서의 협의로 인해 작업시간이 1일 8시간에서 7시간으로 축소 조정되어 [용민2020-강남수도-45(2020.9.29.)호]로 공사실정보고(2차)되었으나, 별도공사인 포장복구로 인해 1일작업을 5시간내에 추진해야하는 상황에 대하여 본공사의 시공사로부터 작업시간제한에 따른 노임할증을 추가반영 요청이 있는 상황임

- 시설공단 검토의견

․ 상기사항에 대하여 우리시 설계변경 담당부서인 계약심사과 토목심사1팀에 유선질의(백승만 주무관 02-2133-3330)한 결과 별도공사인 포장복구로 인해 작업시간이 축소 조정되었다면 이에대한 노임할증을 반영하는 것이 타당할것이라는 답변이 있어 이를 반영하는 것이 타당할 것으로 판단됨

- 개요

********************************************

*********************************************

****************************************

사업소 검토의견

□ 작업시간 축소에 의한 노임할증

- 강남대로 및 테헤란로 구간은 8차선이상 간선도로로 퇴근시간 교통소통을 위해 23시 이후 작업이 가능하며, 출근시간대 교통소통을 위한 도로복구 시간을 감안하여 1일 작업시간을 5시간(23:00~익일04:00)내 추진으로 축소됨에 따른 노임할증(20%) 반영을 요청함

⇒ 작업 사전준비(안전시설설치 등)및 출근시간 교통소통을 위한 협의 작업시간 등을 감안 1일 작업시간은 6시간(23:00~05:00)으로 적용, 1시간 단축됨에 따른 ******* 반영하는 것이 타당하다고 판단됨

□ 상기 보고사항을 향후 설계 변경시 증․감분에 대하여 적용토록 서울시설공단에 회신하고자 함.

붙 임: 공단 실정보고(5차) 관련 서류 각 1부.  끝.