문서번호	도로보수과-12510
결재일자	2020. 12. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
이상하		12/11 강종훈
협조

함께 만드는 안전한 행복도시 서울

2020년 도로굴착복구노면표시설치공사-서부  (제1회, 최종)설계변경시행계획 보고

2020.12.11.

서부도로사업소

[도로보수과]

(제1회, 최종)설계변경시행계획 보고

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2020년 도로굴착복구노면표시설치공사-서부

○ 공사기간 : 2020. 3.30 ~ 2020.12.31

○ 시 공 사 : ***************

○ 총사업비 : *********

***************************************, **************

□ 보고내용

○ 본 공사인 도로굴착복구공사(연간단가)에서 복구한 노면표시 시공물량이 증가되어 정산처리코자 설계변경(최종, 1회)계약을 시행코자합니다.

○ 2020년 도로굴착복구노면표시 설치공사 발주시 노면표시 복구가 소량으로 지반침하예방사업을 포함하여 발주 및 시행하였으나,  공동조사 및 복구 물량이 증가되어 설계변경 사유발생함.

- 19개소 → 79개소

【설계변경 금액

구 분	설계변경 금액(원)		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
총공사비	***********	***********	*************
도 급 비	***********	***********	*************
관 급 비	**********	**********	*************

】

【설계변경  수량

공 종	시공물량(m)		증 ‧ 감
	당 초	변 경
백색 실선 및 파선	9,257	9,908	증) 651m
황색 실선 및 파선	12,494	11,312	감) 1,182m
청색,분홍색 실선 및 파선	1,519	1,843	증) 324m
횡단보도 및 문자기호	19,306	23,586	증) 4,280m
합 계	42,576	46,649	증) 4,073m

】

□ 조치계획

○ 제1회 설계변경(정산)에 따른 부족한 도급액 소요예산 **********은 본 공사 사업비인 도로굴착복구공사 미집행 잔액 ********** 을 사용

○ 병행시행한 ‘20년 지반침하예방사업 미집행잔액 *********을 사용하여 설계변경 시행

□ 향후계획

○ 2020.12.15. : 변경계약(제1회, 최종)

○ 2020.12.18. : 공사준공

붙임 : 1. (최종, 제1회) 설계변경내역서1부.

2. 계약조정금액 검증확인서1부.  끝.