문서번호	총무과-36136
결재일자	2020. 12. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
오수년		김창중	12/14 김혁
협 조

「2020년도 청사 전기설비 유지보수공사(연간단가)」

설계변경(2회) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 12.

행정국

(총무과)

「2020년도 청사 전기설비 유지보수공사(연간단가)」

설계변경(2회) 검토보고

「2020년도 청사 전기설비 유지보수공사(연간단가)」와 관련하여  계약물량의 변경(증·감) 및 신규공종 발생 등으로 설계변경 후 준공처리 하고자 아래와 같이 보고 드림.

□ 관련근거

○ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

(설계 변경으로 인한 계약금액의 조정)

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준

- 13장 공사계약 일반조건 제6절(공사설계의 변경), 제7절(계약금액의 조정)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2020년도 청사 전기시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2020.01.01.~ 12.31.

○ 계약금액 : *****************************

○ 계 약 자 : ****************

○ 공사내용 : 청사 전기시설물 유지보수공사

□ 설계변경 현황

○ 변경 사유

- 설계변경(1회) 계약 후 진행한 공사 중 기존 공종의 물량 증감과 계약내역에        없는 품목·비목 추가 발생

- 이에, 준공을 위하여 공사량 증감 및 신규 품목·비목 추가 등을 반영한 설계        변경 필요

○ 주요 변경 내역

공종(규격)	단위	변경 전		변경 후		증감
		수량	금액(천원)	수량	금액(천원)	수량	금액(천원)
강제전선관설치(28㎜)	m	100	3,225	72	2,322	감 28	감 903
금속가요전선관(22㎜)	m	200	2,589	166	2,149	감 34	감 440
케이블트레이(200*100)	m	0	0	45	2,594	증 45	증 2,594
FCV 150㎟×1C	m	0	0	300	9,851	증300	증 9,851
누전차단기(30AF,2P)	개	16	639	16	639	-	-
LED등기구(25w)	개	300	8,731	247	7,189	감 53	감 1,542

○ 계약금액 변경

구분	변경 전	변경 후	증감	비고
공사비	250,960,520	250,960,520	-	금액변동 없음

○ 적용단가 협의

- 관련근거 : 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 공사계약 일반조건 제7절         (계약금액의 조정)

- 합의 결과:  물량 감소 및 증가는 계약단가 적용, 신규비목은 설계변경 당시를          기준으로 산정한 단가에 낙찰율을 곱한 금액으로 적용

□ 조치계획

○ 설계변경에 따른 변경계약 의뢰(재무과)

○ 변경계약 완료 후 준공

붙임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 합의각서 2부.  끝.