투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	대영유비텍(주)
(경유)
제목	설계변경 승인 회신(2020년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사)

1. 문서번호 대영유비텍(주) 대영GE20A-12-32호(2020.12.11.)와 관련입니다.

2. 설계변경 요청한 2020년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사에 대하여 아래와

같이 승인 회신하오니 변경계약 및 공사시행(준공) 등 감리업무 처리에 만전을 기하여

주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2020년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사

나. 공사기간 : 2020.9.10. ~ 2020.12.23.

다. 계약업체 : ㈜두화공영 대표 박정희

라. 설계변경 승인내용

구 분	당 초	변 경	증 감
도 급 비	241,222,000원	184,954,000원	감)56,268,000원

끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	호정오		기전과장	전결 12/14 서승완
협조자
시행	기전과-10267	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 강서구 양천로 237(마곡동) 강서도로사업소 기전과	/
전화	02-2657-7969	/전송	02-2657-7939	/		/	대시민공개