문서번호	공원시설과-5368
결재일자	2020. 12. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	공원시설과장	공원부장
현병철	최연호	12/14 김인숙

『뚝섬 및 망원한강공원 자연(형)호안 복원사업 전기공사』

설계변경(1회) 검토보고

2020. 12.

한강사업본부

(공원시설과)

『뚝섬 및 망원한강공원 자연(형)호안 복원사업 전기공사』

설계변경(1회) 검토보고

우리본부에서 시행중인 『뚝섬 및 망원한강공원 자연(형)호안 복원사업 전기공사』에 대하여 현장여건에 따른 물량 증감을 반영하여 설계변경 하고자 보고 함.

※ 서울시설공단 공사감독3처-11949(2020.12.14.) 호와 관련임

공사개요

○ 공 사 명 : 뚝섬 및 망원한강공원 자연(형)호안 복원사업 전기공사

○ 도 급 비 : 금66,012,600원

○ 공사기간 : 2020.03.30.~2021.11.19.

○ 도 급 자 : ㈜새재전기 대표 : 김시환

설계변경 내용

구 분	설 계 변 경 내 용	비 고
가로등 철거	◼ 현장여건에 맞게 수량 조정 ▸LED 보안등기구 철거(100W, 재사용철거) : 8본 → 11본 ▸가로등기초(기성품)철거 : 11개 → 14개	실정보고 승인통보 [공원시설과 – 5225(2020.12.8.)]
가로등 신설	◼ 현장여건에 맞게 수량 조정 ▸Pole Light 기계설치(10~12m) : 8본 → 11본 ▸폴리에틸렌전선관-매입(PE, 36mm) : 446m → 596m ▸0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV,1C*16㎟) 4열 : 234m → 435m

변경금액

구 분		공 사 비(원)		증 감	비 고
		당 초	변 경
도급액	공급가액	60,011,455	68,855,455	8,844,000
	부가세	6,001,145	6,885,545	884,400
	도급비계	66,012,600	75,741,000	9,728,400

○ 예산과목

- 한강공원 이용 및 생태환경 개선, 한강 자연성 회복, 자연(형)호안복원,시설비 및 부대비, 시설비 (예산편성부서 : 한강사업본부 기획예산과)

조치의견

○ 위와 같이 신규공정과 현장여건에 따른 물량증감을 반영한 설계변경을 시행하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 서울시설공단 설계변경도서 제출서류 3부.

2. 제비율 검증확인서 1부.  끝.