문서번호	설비부-20259
결재일자	2020. 12. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
김수진	이종근	12/14 이달영

『동부간선도로(2공구) 교통관제센터 광전송장비』

준공 정산 검토 보고

2020. 12.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『동부간선도로(2공구) 교통관제센터 광전송장비』

준공 정산 검토 보고

『동부간선도로(2공구) 확장 통신공사』와 관련하여 건설사업관리기술단으로부터 제출된 관급자재(광전송장비) 준공 정산에 대하여 검토하고 보고 드림

1		공사현황

❍ 공 사 명: 동부간선도로(2공구) 교통관제센터 광전송장비 제작구매

❍ 공사위치: 노원구 녹천교 ~ 상계주공11단지

❍ 납품기간: 2020.10.23. ~ 2020.12.31.

❍ 계약금액: 196백만원

❍ 계약상대자: 주식회사 혜성테크윈

❍ 건설사업관리단: (주)이산

2		검토내용

관련근거

❍ 관급자재 준공정산내역 검토보고[동부2감-20-770호(`20.12.14.)]

설계변경 내용

❍ 설계변경 사유

- 준공에 따른 제경비 정산(산업안전보건관리비 등)

❍ 변경금액                                                    [단위: 원]

구 분	당 초	변 경	증, 감(-)	비고
총액계약	***********	***********	***********

❍ 세부 정산내용                                               [단위: 원]

구 분	당 초	변 경	증, 감(-)	비고
산업안전보건관리비	*********	*********	***********

건설사업관리기술자 검토의견

❍ 교통관제센터 광전송장비 제작구매설치 계약의 보험료 정산에 따른 변경설계서를 검토한 결과 계약금액 조정은 적정하다고 판단됨.

3		보고자 의견

❍ 각종 보험료 등을 정산 반영하기 위한 건설관리사업 기술자의 검토보고 내용이 타당하다고 판단되므로, 산업안전보건관리비 등 사후정산 항목을 정산(감액)하여 준공(지급) 처리하고자 함

붙 임: 건설사업관리단 공문 1부.  끝.