문서번호	기전과-7353
결재일자	2020. 12. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	남부도로사업소장
이태근		석대창	12/14 변봉섭
협조

『2020년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사』

설계변경계획보고(3차)

2020. 12.

남부도로사업소

(기전과)

『2020년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사』

설계변경계획보고(3차)

2020년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사(연간단가) 중 감리원으로부터 제출된 설계변경보고에 대해 아래와 같이 검토보고 함.

Ⅰ
		관 련 근 거

□ 감리 ㈜트래픽스 TR-본-1211(2020.12.10)

「2020 교통안전표지 설치 및 유지보수공사 3차 설계변경검토」

Ⅱ
		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 2020년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사(연간단가)

□ 공사위치 : 관내(동작, 관악, 금천, 서초, 영등포 일부)

□ 공사내용 : 교통안전표지 신설(서울지방경찰청 규제) 및 일상 유지보수

□ 계약금액 : *************

□ 계약업체 : *****************

□ 계약기간 : 2020. 2. 21. ~ 12. 28.

□ 감 리 사 : **************

Ⅲ
		추 진 경 위

□  ’20. 02.04. : 공사발주

□       02.21. : 공사착공

□       04.21. : 제1차 작업지시

□       05.30. : 제1차 작업완료

□       05.07. : 제2차 작업지시

□       06.26. : 제2차 작업완료

□       07.08. : 제1차 설계변경

□       10.07. : 제3차 작업지시

□       10.28. : 제3차 작업완료

□       10.30. : 제2차 설계변경

□       11.26. : 제4차 작업지시

□       12.11. : 제4차 작업완료

Ⅳ
		설계변경 사 항

□ 주요 설계변경 내용

◼ 주요 공정 물량 변경

연번	품 명	규 격	단 위	수 량
				당 초	변 경	증 감
1	규격삼각 교체	Ø900(고휘도)	매	8	20	증 12
2	규격사각 교체	400*400 고휘도	매	10	7	감 03
3	중형 원형 교체	Ø900(고휘도)	매	16	21	증 05
4	규격 T형부착대 교체	2매용 백관	조	12	19	증 07
5	고소용표지 신설		매	97	109	증 12
6	고소용표지 교체		매	24	27	증 03

※ 물량 변경 세부내역은 설계변경 내역서 참조

〇 제경비 정산

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
직접재료비	62,900,307	63,961,030	증) 1,060,723
직접노무비	25,762,681	26,242,948	증) 1,682,128
간접노무비	3,349,148	3,411,583	증) 211,948
산재보험료, 고용보험료	1,339,143	1,364,108	증) 542,702
건강보험료, 연금보험료 퇴직공제부금, 노인요양보험료	0	0	0
산업안전보건관리비, 환경보존비 등	1,702,225	0	감) 1,702,225
경비(기계, 기타)	10,908,765	1,108,354	증) 199,589
간접비(일반관리비, 이윤 등)	24,037,731	33,911,977	감) 161,726
합 계	130,000,000	130,000,000	0

□ 설계변경금액 : 금액변동 없음                    (단위 : 원)

구 분		금 액
		당 초	변 경	증 · 감
도급비	공 급 가 액	118,181,819	118,181,819	-
	부가가치세	11,818,181	11,818,181	-
	합 계	130,000,000	130,000,000	-

◼ 예산과목 : 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물 관리, 교통사업특별회계, 교통안전표지 설치 및 유지보수, 시설비

□ 감리원 기술검토 의견

◼ 현장여건에 따른 제1~4차 작업 물량내역 조정 및 제경비 정산등을 반영하여 설계변경을 실행하는 것이 타당하다 사료됨.

Ⅴ
		보고자 의견

□ 감리원이 설계변경 요청한 사항을 검토한 결과,

- 제1~4차 작업물량 변경 및 제경비 정산 등으로 책임감리원의 설계변경 검토의견이 타당함으로 이를 반영하여 설계변경을 시행하고자 함.

□ 설계변경 후 준공(검사)처리하여 해당사업을 완료하고자 함

Ⅴ
		향 후 계 획

□ 2020. 12.15. : 설계변경 시행

□ 2020. 12.18. : 공사준공.

붙임 : 감리검토보고(3차설계변경) 1부.  끝.