문서번호	공원시설과-5362
결재일자	2020. 12. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	공원시설과장	공원부장		한강사업본부장
이병철	최연호	김인숙		12/14 代기봉호
협 조
	기획예산과장		문영일

『2020 한강수영장(몰놀이장) 보수공사』

설계변경(2회) 계획보고

2020.12.

한강사업본부

(공원시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

『2020 한강수영장(몰놀이장) 보수공사』

설계변경(2회) 계획보고

우리본부에서 시행중인 『2020 한강수영장(물놀이장) 유지보수공사』에 대하여 신규공종과 현장여건에 따른 물량증감 및 4대보험 등의 정산 설계변경을 보고 함.

※ 서울시설공단 공사감독1처-8811(2020.12.11.)호와 관련임

공사개요

○ 공 사 명 : 2020 한강수영장(물놀이장) 유지보수공사

○ 위    치 : 수영장(광나루, 뚝섬,  여의도), 물놀이장(양화, 난지)

○ 공사기간 : 2020. 4.29.~ 12.31

○ 총공사비 : **************

- 도  급  비 : **************

- 관  급  비 :   ************

- 폐  기  물 :    ***********

- 기타이전비 :   ************

설계변경 내용

○ 예산 변경

구 분	변 경 전	변 경 후	비고(증감)
총 공 사 비	*************	*************	*****************
도 급 비	*************	*************	******************
관 급 비	***********	***********	*****************
폐 기 물	**********	**********	*******************
기 타 이 전 비	***********	*	*******************

○ 주요 변경내용

- 여의수영장 노후 타일제거 및 방수방식(폴리우레아공법)

- 난지물놀이장 데크철거 및 화강판석 설치

- 난지물놀이장 파손 스틸그레이팅 교체

- 4대보험 등 정산

- 건설폐기물 처리물량 증가

공종	규격	단위	수량		증 감	비고
			변경전	변경후
타일제거 및 방수방식 (폴리우레아)		㎡	-	2,208.3	증)2,208.3	**********
데크철거 및 화강판석설치		㎡	-	775.3	증) 775.3	*************
스틸그레이팅 교체		식	-	12	증) 12	***********
4대보험등정산		식	-	1	증) 1	**********
소계						***********
폐기물 처리		톤	387.9	458	증)70.1	*********
소계						**********

○ 예산과목

- 한강공원관리 및 운영, 한강공원시설관리 및 개선, 한강공원 수영장            유지관리, 시설비

조치의견

○ 위와 같이 신규공정과 현장여건에 따른 물량증감 및 4대보험등 정산을 반영한 설계변경 시행하여 공사추진에 철저를 기하고자 함.

붙임  1. 설계 변경내역서 1부

2. 공단공문 1부

3. 폐기물 변경내역서 1부.  끝.