문서번호	운영과-2279
결재일자	2020. 12. 14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	운영과장
정경성	장인환	12/14 김학춘
협 조

준공기한 연기 보고

(2020년 물재생 전기설비 보수공사(연간단가)

2020. 12.

준공기한 연기 보고

(2020년 물재생 전기설비 보수공사(연간단가)

「2020년 물재생 전기설비 보수공사(연간단가)」 와 관련하여 준공기한을 연기코자 보고 드림

1		관련근거

○ 「2020년 물재생 전기설비 보수공사(연간단가)」

계약번호 : 20200*******00

2		공사개요

○ 공 사 명: 2020년 물재생 전기설비 보수공사(연간단가)

○ 계약업체: 주식회사 그린중전기 대표 김종철

○ 계약기간: 2020. 6.12. ~ 2020.12.14.

○ 계약금액: 금60,891,250원

○ 공정율 : 90%

3		준공기한 연기 사유

○ 연기사유:

-  발주처에서 조명 개선을 위한 자재 선정 검토 지연에 따른 소요 자재

수급 일정 부족 및 작업 물량 증가에 따른 공기 부족

○ 계약변경 내용

구분	변경 후	변경 전	비고
계약금액	금60,891,250원	금60,891,250원	변경없음
계약기간	2020. 6.12. ~ 2020.12.14.	2020. 6.12. ~ 2020.12.29.	15일 연장

○ 공기연기 귀책사유 : 서울특별시 난지물재생센터

○ 지체상금 부과여부: 미부과

4		행정사항

○ 관리과에 계약기간 변경 의뢰.  끝.