문서번호	교량안전과-18702
결재일자	2020. 12. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기술점검팀장	교량안전과장
윤세희		위성환	12/14 代박동욱
협 조
	교량기획팀장			박동욱
	교량관리팀장			강천수
	특수교량팀장			정준용
	강구조교량팀장			박찬규

2020년 수중구조물 점검결과 보고

2020. 12.

안전총괄실

(교량안전과)

2020년 수중구조물 점검결과 보고

2020년 광진교 등 10개 교량에 대한 수중구조물(우물통) 점검 결과 및 손상부분에 대한 보수보강 계획을 수립하여 교량시설물의 내구성과 안전확보에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 2020년 수중구조물 발주계획 보고(교량안전과-1337, 2020.01.29.)

□ 점검개요

○ 점검대상 : 10개 교량 204기

- 한강교량(8) : 광진교, 청담대교, 성수대교, (신)한강대교, (구)한강대교, (상)마포대교, 성산대교, (상)행주대교

- 일반교량(2) : 양화교, 양평교

○ 점검기간 : 2020.03.05.~2020.12.10

○ 점검방법

- 사전에 잠수부로 하여금 우물통에 붙은 이물질 등 제거

- 자체 개발한 정밀 촬영장비로 우물통 수중촬영 및 판독실시

- 투입 인원 및 장비

· 인 원 : 3명(1개조 운영)

· 장 비 : 수중 촬영장비 3대(부양식2, 막대식1) 및 보트 2대

※ 장비로 촬영이 어려운 장소는 잠수부가 수중에서 촬영

장비 및 점검현황 사진

□ 점검결과

○ 총    괄

교 량 명	우물통 점검(기)				점 검 결 과
	총 수량	점검	양호	손상부발 견	전 체 면 적 (㎡)	손 상 면 적 (㎡)	손상율 (%)	점검내용(개소)
계	204	201	155	46	26,870	37.638	0.86	소파 99, 균열 7,철근노출 1, 소파 및 철근노출 6 계 113
광 진 교	19	19	7	12	3,170	6.399	0.20	소파 17, 균열 6,철근노출 1, 소파 및 철근노출 2, 계 26
청 담 대 교	15	14	14	-	1,604	-	-	양호함
성 수 대 교	28	27	23	4	2,646	2.430	0.09	소파 5
(신)한강대교	32	32	17	15	4,552	9.149	0.20	소파 29, 균열 1 소파 및 철근노출 4 계 34
(구)한강대교	32	32	31	1	3,245	0.475	0.02	소파 3
(상)마포대교	37	37	36	1	3,305	0.240	0.01	소파 1
성 산 대 교	17	18	7	11	5,829	18.375	0.32	소파 40
(상)행주대교	13	12	10	2	2,292	0.570	0.02	소파 4
양 화 교	10	9	9	-	194	-	-	양호함
양 평 교	1	1	1	-	33	-	-	양호함

※ 청담대교, 성수대교, (상)행주대교, 양화교 : 우물통 묻힘으로 점검 못함(각 1개소)

성산대교 : 물량 정정

○ 교량의 구조안전에 영향을 미치는 중대한 손상(전도) 및 하상의 변화는 발견되지 않음

□ 조치계획

○ 손상정도에 따라 지속관찰, 보수여부 판단 및 보강계획 수립

- 2021년 시행 예정인 교량별 정밀안전진단 용역에 포함하여 보수 여부 판단 및 보강계획 수립

· 대 상 : 광진교, 성수대교, (신)한강대교, (구)한강대교,  (상)마포대교, 성산대교, (상)행주대교

· 수 량 : 46기(7개 교량)

○ 점검결과를 수중구조물(우물통) 이력관리 파일에 입력 조치

(수중구조물 점검팀 시행)

○ 청담대교 수중구조물 점검결과 통보(서울시설공단)

붙임  1. 2020년 수중구조물 점검결과 1부.

2. 2020년 수중구조물 손상면적 현황 1부.

3. 수중구조물 점검 보고서 1부(별책 제본) 1부.  끝.