설계변경 심의 의견서

부분공개(5)

1.공사명:2020년 강북취수장 기계설비 보수공사 (연간단가)

신청부서명	원수관리과
작 성 자	이승수
제출년월일	2020. 12. 14

2. 심의 위원회 의견

- 심의일시 : 2020. 12. 14(월) 10:00

- 심의의견 : 설계변경에 따른 심의 결과에 대하여

아래와 같이 의견을 제시함.

위   원

직  위

성  명

서  명

의  견

위    원

원수관리과장

최양교

12/14

최양교

타당함

위    원

주무관

도보선

도보선

타당함

위    원

주무관

김종필

김종필

타당함

위    원

주무관

정정재

정정재

타당함

위    원

주무관

이종팔

이종팔

타당함

담    당

주무관

이승수

이승수

타당함

ㅈ

설계변경 사유서

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2020년 강북취수장 기계설비 유지보수공사(연간단가)

○ 계약기간 : 2020.4.01. ~ 2021.3.31.

○ 계약금액 : 금41,293,130원

○ 계 약 자 : 센제이앤씨 대표 전 면 식

□ 설계변경 주요내용 및 사유

○ 설계변경 근거 :지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령  제74조

○ 변경사유      : 계약기간 중 계약물량 변경

□ 설계변경 금액

구 분	금액		증·감	비 고
	당초	변경
******	**********	**********	*	***********
************************	**********	**********	*
******* ****************	*********	*********	*

□ 주요 변경내역

○ 보험료 등 제경비 항목 실정산에 따른 감발생

- 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료,산업안전보건관리비 등

○ 물량변경에 따른 순공사비 및 법령에 따른 제경비 증감내역

연번	공 종	금액		증·감	내 용
		당초	변경
****		**********	**********	***********	**************
*	*****	*********	*******	************	****************************
*	*****	*******	*******	*********
*	****	*******	******	**********
*	*****	*******	*******	*********
*	*****	*********	*******	*********
*	******	******	******	********
*	*********	*******	*******	*********
*	****	*********	*********	*********
*	*****	*********	*********	*********
**	**	*********	*********	***********
****		**********	**********	*	*
***		*********	*********	*	*
***		**********	**********	*	*

□ 심의사항

○ 물량 증·감 적정성 여부

○ 단가적용 적정성 여부

○ 제비율 산정 및 요율의 적정성 여부 등

붙 임 : 1. 설계변경 내역서  1부.

2. 검증확인서       1부.  끝.