문서번호	기전과-12712
결재일자	2020. 12. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
정영권		배수웅	12/14 이규상
협조

『서울시도 안전속도 5030 교통안전표지 개선공사』

교통안전표지 공사 설계변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 12. 11.

동부도로사업소(기전과)

『서울시도 안전속도 5030 교통안전표지 개선공사』

교통안전표지 공사 설계변경 검토보고

「서울시도 안전속도 5030 교통안전표지 개선공사」와 관련 감리업체로부터 제출된 설계변경 요청사항에 대하여 검토하고 보고 드림.

1		관련근거

□ 설계변경서류 제출

○ ㈜건양엔지니어링 건양20-492호(2020.12.11.)

2		계약현황

□ 계 약 명 : 서울시도 안전속도 5030 교통안전표지 개선공사

□ 계약기간 : 2020. 07. 08.(수) ~ 12. 20.(일)

□ 계약업체 : ************

□ 계약금액 : ********************************

□ 감리업체 : ***************

3		설계변경 내용

□ 설계변경 사유

○ 현장여건 반영에 따른 물량변경 및 보험료, 제경비 정산

□ 주요물량 변경내역

구분	주요공정	단위	수량		증·감	금액		증·감(원)
			당초	변경		당초	변경
표지	1. 교통안전표지 신설	ea	948	464	-484	**********	*********	**********
	2. 교통안전표지 교체	ea	0	503	503	*	**********	**********
	3. 교통안전표지 철거	ea	605	171	-434	**********	*********	***********
	4. T형부착 및 교차로대	ea	551	655	104	**********	**********	*********
	5. 정주식 철주 및 페이퍼폴	ea	10	1	-9	*******	*******	********
	6. 고소용	ea	383	483	100	*********	**********	*********
	7. 발광형표지	ea	8	8	0	*******	*******	*
	8. 문안수정	㎡	0	6	6	*	*******	*******
	9. 기 타	ea	5	0	-5	*******	*	********
		ea	2,510	2,291	-219	**********	**********	**********
소 계

□ 물량변경 상세내용

호표	구 분		구분	단위	수 량			비 고
	품 명	규 격			당초	변경	증ㆍ감
1-5	규격 원형	Φ600 고휘도	신설	매	23	18	-5
1-6	규격 원형	Φ600 고휘도	교체	매	0	5	5
1-23	규격 T형부착대	1매용 백관	신설	SET	0	18	18
1-26	규격 T형부착대	1매용 백관	교체	SET	0	5	5
1-30	규격 T형부착대	1-23h,24h,25h	철거	SET	0	2	2
1-32	규격 철주	2매용 백관(L=3.6m)	신설	SET	5	0	-5
1-34	규격 철주	1-31h,32h,33h	철거	SET	5	0	-5
2-9	중형1	Φ780 고휘도	신설	매	540	192	-348
2-10	중형 원형	Φ780 고휘도	교체	매	0	360	360
2-11	중형2	Φ900 고휘도	신설	매	350	219	-131
2-12	중형 원형	Φ900 고휘도	교체	매	0	138	138
2-25	중형 사각	780*780 고휘도	신설	매	10	10	0
2-27	중형 사각	900*300 고휘도	신설	매	14	14	0
2-37	중형 T형부착대	1매용 백관	신설	SET	520	214	-306
2-38	중형 T형부착대	2매용 백관	신설	SET	20	2	-18
2-39	중형 T형부착대	1매용 백관	교체	SET	0	258	258
2-42	중형 T형부착대	2-37h,38h	철거	SET	0	148	148
2-43	중형 교차로대	백관	신설	SET	11	8	-3
2-47	중형 철주	1매용 백관(L=3.5m)	신설	SET	0	1	1
2-55	철주 기초제거(전체)		철거	SET	5	0	-5
3-14	문안수정(고소용)	고휘도	보수	M2	0	6	6
4-1	사각	900*900 고휘도	신설	매	11	11	0
5-3	고소용표지		신설	매	383	227	-156
5-4	고소용표지		교체	매	0	235	235
5-6	고소용표지		철거	매	0	21	21
6-3	규격 원형	Φ600	철거	매	5	2	-3
6-17	중형1	Φ780	철거	매	469	150	-319
6-18	중형2	Φ900	철거	매	123	13	-110
6-29	중형 사각	780*780	철거	매	8	4	-4
6-37	사각	900*900	철거	매	0	2	2
9-1	발광형표지판 (축전지 포함)		신설	SET	8	8	0

□ 보험료 및 제경비 정산

(단위 : 원)

구분	변경전 금액	변경후 금액	증·감		비고
기계경비	**********	**********	*	***********
산재보험료	***********	**********	*	********
고용보험료	********	********	*	********
건강보험료	**********	***	*	**********
연금보험료	**********	****	*	**********
기타경비	**********	**********	*	**********
산업안전보건관리비	**********	**	*	**********
노인장기요양보험료	********	**	*	********
환경보전비	********	**	*	********

4		설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분		변경전 금액	변경후 금액	증 / 감		비고
총공사비		*************	***********	*	*********
도급비	공급가액	***********	***********	*	*********
	부가가치세	***********	**********	*	*******
	소 계	*************	***********	*	*********

※ 『서울시도 안전속도 5030 교통안전표지 개선공사』 낙찰차액 사용 계획 보고(기전과-12668호)

5		감리단 검토의견

□ 현장여건에 따른 물량변경 및 보험료 등 제경비 정산으로 설계변경이 필요함』

6		보고자 의견

□ 감리업체로부터 접수된 설계변경에 대하여 검토한 결과 감리의견이 적정하므로 낙찰차액 사용 및 설계변경 승인하여 관리단속과에 변경계약을 의뢰하고자 함.

붙임  1. 설계변경서류 제출 공문 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 설계변경 검증 확인서 1부.

4. 합의각서 1부.

5. 낙찰차액 사용 계획서 1부.  끝.