등록번호	치수과-15865		주무관		치수팀장		치수과장		생활도시친화국장
등록일자	2020.12.11.
			최준영		전일섭		윤기찬		12/14 代안병석
결재일자	2020.12.14.
공개구분	대시민공개
			협 조
『2020년 관내 하수도 준설공사(연간단가)』 설계변경(제2회,최종) 시행계획 보고
생활도시친화국 치수과

『2020년 관내 하수도 준설공사』

설계변경(제2회,최종) 시행계획 보고

우리 구에서 시행 중인『2020년 관내 하수도 준설공사』와 관련하여 현장 시공물량 변경(증·감) 등 설계변경 요인이 발생하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 함

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 2020년 관내 하수도 준설공사

공사기간 : 2020.02.13. ~ 12.31.

도 급 자 : 흥진건설(주) 대표 차창훈

총사업비 : 1,543백만원(시비 290백만원, 구비 1,400백만원)

(도급비 1,458백만원, 이설비 및 기타 85백만원)

공사규모 : 바켓준설 V=690㎥, 흡입준설 V=610㎥, 세정 L=19,125m

Ⅱ		설계변경 내용

설계변경 주요내용

◯ 낙찰차액 사용(146백만원)

- 관련근거 : 치수과-13258호(2020.10.20.)

주요물량 변경 내역

구 분	단 위	당 초	변 경	비 고
바 켓 준 설	㎥	690	1,010	(증)	320
흡 입 준 설	㎥	610	630	(증)	20
하수관 세정	m	19,125	14,080	(감)	5,045

공사비 변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	비 고
총공사비		1,543,600,000	1,690,000,000	(증)	146,400,000
도급비	공급가액	1,326,000,000	1,421,818,182	(증)	95,818,182
	부 가 세	132,600,000	142,181,818	(증)	9,581,818
	계	1,458,600,000	1,564,000,000	(증)	105,400,000
이설비 및 기타		85,000,000	126,000,000	(증)	41,000,000

Ⅲ		조 치 의 견

상기와 같이 공사현장 시공물량 변경(증·감)사항 등을 반영하여 설계변경 시행하고자 함

붙 임 : 1. 보고서 1부.
2. 설계변경 내역서 1부.  끝.