문서번호	설비부-20294
결재일자	2020. 12. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
나경운		여인웅	12/15 이달영
협조	주무관		박경철
	주무관		변년미

탄천물재생센터 총인처리시설 기계설비공사

2차 제3회 기성검사 결과보고

2020.  12.

탄천물재생센터 총인처리시설 기계설비공사

2차 제3회 기성검사 결과보고

탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사 2차 제3회 기성검사 대한 결과 보고임.

1		공사개요

○ 공사명: 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사

○ 위  치: 강남구 개포로 625 일원(탄천물재생센터 내)

○ 규  모: 하수처리시설 Q=900,000㎥/일

- 총인 450,000㎥/일+ 비총인 450,000㎥/일= 혼합방류(T-P 0.5㎎/L 이하)

○ 기  간:′17. 12. 4.~′20. 3. 31.(2차′1 9. 12. 12.∼′20. 3. 31.)

○ 도급비: 1,837백만원(2차 1,473백만원)

○ 건설사업관리단 및 시공사: ㈜선진엔지니어링, ㈜이수에이치앤씨 외 2개사

○ 공정률: 85.76%(기성부분)

2		관련근거

○ 2차 3회 기성검사 결과보고(선진엔지니어링 PSC-2020-854호, 2020. 12. 11.)

○ 2차공사 제3회 기성부분 검사원 제출(이수 제2020-29호, 2020. 11. 26.)

3		기성검사 결과 및 대금지급

○ 기성부분: ′19. 12. 12. ~ ′20. 12. 9.

- 기존 기성: ′19. 12. 12. ~ ′20.  9.  15.

- 금회 기성: ′20. 9. 16. ~ ′20. 12.  9.

○ 검사일자: ′20. 12. 9.

○ 검 사 자: 기술지원 건설사업관리기술자 김병두

책    임 건설사업관리기술자 심성만

○ 검사결과: 기성검사 수행 결과, 기성을(기성률 85.76%) 인정함.

○ 기성금액 내역

- 계약금액: 1,473,562,190원

*****************************

*******************************

*****************************

○ 대금청구 내역

연번	업체명	청구금액	은행명	계좌번호	비고
1	***	***********	****	*****************	***********
2	***	***********	****	***************	***********
3	*****	**********	****	****************	************
합계		***********

○ 예산과목: 공기업특별회계, 자본적지출, 비가동설비자산취득, 건설중인자산, 시설비및부대비, 시설비(탄천물재생센터 총인처리시설 설치공사)

4		조치계획

○ 건설사업관리단에서 기계설비공사 2차 제3회 기성검사를 실시한 결과, 적합함에 따라 공기업특별회계 지출담당에게 검사결과를 제출하여 대금을 지급하고자 함.

붙임  1. 제3회 기성검사 결과보고(기성검사조서 및 기성내역서) 1부.

2. 대금청구서 1부.  끝.