문서번호	인력개발과-22607
결재일자	2020. 12. 15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		인재노무팀장	인력개발과장
김자겸		김형태A	12/15 김현중
협 조

- 서천연수원 증기보일러 교체공사 -

설계변경(준공정산 포함) 검토 보고

2020. 12.

행 정 국

(인력개발과)

서천연수원 증기보일러 교체공사 설계변경(준공정산 포함) 검토보고

「서천연수원 증기보일러 교체공사」의 설계변경(준공정산 포함) 사항에 대한 변경요청이 접수되어 검토결과를 보고드림******************

□ 관련문서

○ 설계변경서류 제출(자연 2020-12-11호, ’20.12.11.)

□ 공사개요

○ 공 사 명: 서천연수원 증기보일러 교체공사

○ 공사규모: 증기보일러(저녹스보일러 2.5톤 3대) 및 열교환기 등 교체

○ 공사기간: ‘20.09.29. ~ ’20.12.17.

○ 계약금액: 173,333,690원

○ 시 공 사: 자연이엔지 주식회사(대표: 한필수)

□ 설계변경(준공정산 포함) 내용

구 분	변경 사유 및 내용	증감액(원)
급탕탱크 플랜지 보수	급탕탱크 플랜지 용접부 균열에 따른 누수 발생으로 플랜지 및 관련 배관 교체(추가공사)	***********
경비 등	기타경비(간접노무비 포함): 공사비 변경분 반영	********
	보험료(산재보험료 등): 실사용 실적에 따른 정산	*********
	산업안전보건관리비 등: 공사비 변경 및 실사용 실적 반영	***********
일반관리비	공사비 등 변경분 반영	*********
이 윤	공사비 등 변경분 반영	*********
부가가치세	10%	*********
계		***********

□ 검토의견

○  ‘급탕탱그 플랜지 보수’ 추가

- 급탕탱크 플랜지 노후화에 따른 균열 발생으로 누수가 발견되어 플랜지 및 관련 배관 보수 추가공사 시행한 것으로 적정*************

○ ‘보험료 등’ 변경(준공정산)

- 시공사의 실 사용실적을 반영한 것으로 적정*************

□ 설계변경 금액(준공정산 포함)

(단위: 원)

구 분	변 경 전	변 경 후	증감액
*****	***********	***********	***********
*****	**********	**********	*********
*******	***********	***********	***********

□ 조치계획

○ 설계변경(준공정산 포함) 사항에 대하여 담당부서에 계약변경 의뢰

붙임  1. 시공사 설계변경(준공정산 포함) 요청 공문 1부.
2. 설계변경(준공정산 포함) 내역서 1부.

3. 계약금액조정 검증확인서 1부.  끝.