문서번호	교량안전과-18810
결재일자	2020. 12. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		강북일반교량팀장	교량안전과장
김태형		민형일	12/15 代박동욱
협조

「2020 1종교량 일상유지 보수공사(강북)」

설계변경(1회, 정산)시행 검토 보고

2020. 12.

안전총괄실

(교량안전과)

『2020년 1종교량 일상유지 보수공사(강북)』

설계변경(1회, 정산)시행 검토 보고

『2020년 1종교량 일상유지 보수공사(강북)』설계변경 사항에 대한 책임

건설사업관리기술자 검토 의견서가 제출되었기에 내용을 검토하고 그 결과를 보고드림.

1		관련근거

□ 공사계약 일반조건 제19조(설계변경 등)

(기획재정부예규 제441호, 2019.6.1.)

□ 1종교량 일상유지보수공사-강북 작업지시(1~14차)

□ 설계변경현황(1회)검토보고(제일 2020-4199호, ‘20.12.09.)

2		공사개요

□ 공 사 명 : 2020년 1종교량 일상유지보수공사-강북

□ 공사위치 : 강북일반 교량 14개소(구룡교 외 13개소)

□ 공사기간 : ‘20.01.02. ~ ’20.12.31.

□ 도 급 자 : *************

□ 도 급 비 : ************

□ 공사개요 : 강북일반 교량 14개소에 대한 효율적 유리관리를              위한 상시 보수체계 구축에 따른 신속한 보수·보강

○ 아스팔트포장 및 방수12a, 신축이음보수 36m, 표면보수 2,000㎡ 기타1식 등

3		설계변경 내용

□ 주요 작업 지시현황(1~14차)

차수	해당교량	작업지시 내역	비고
1	동작대교(하부)	- 현장사무실설치(콘테이너3개소)
2	모래내고가	- 벽체 단면보수 등(592㎡)
3	구룡교 외11개소	- 난간세척(2,300㎡),방음판세척(5,600㎡) 등
4	용비교	- 종방향신축이음고무재교체(200m)
5	구룡교	- 유도배수로(71m), 누수차단장치(90m)
6	두무개다리	- 화단울타리(173㎡), 방호책(60m)
7	응봉교,용비교	- 신축이음 누수장치 정비(110m)
8	응봉교	- 방음판 교체(291㎡)
9	겸재교, 한남1고가	조류충돌방지스티커(459㎡) - 천정콘크리트표면보수(1,026㎡)
10	구룡교외 13개소	추석명절대비 비상대가 및 순찰
11	워커힐고가	절삭후 아스콘 포장 18.7a
12	모래내고가	평삭및덧씌우기 18a 등
13	응봉교, 용비교, 이화교	- 종방향 점검통로 설치(70m) 오름방지, 투석방지 등
14	워커힐고가외9개소	- 조류방지시설설치 463㎡, 콘크리트표면보수 252㎡ 등

□ 주요 설계변경 내용

○ 시공물량 증·감

· 신축이음장치 보수 NEW f/j   : 당초 0 →         변경 38m

· 신축이음장치 고무방수재 교체 : 당초 0 →         변경 240m

· 조류방지시설설치(강교)       : 당초 1,500㎡ →  변경 0

· 구조물세척(야간)             : 당초 32,000㎡ → 변경 12,198㎡

· 화단울타리(게비온)설치       : 당초 0 →         변경 173m

○ 제경비, 이전비, 관급비 정산

· 작업지시 1건 금액 4천만원이상 산업안전보건관리비 계상 반영 및 제경비 정산 반영

· 관급자재비 및 이전비(폐기물처리비) 정산 반영

· 고용개선지원비 반영(전자카드단말기 임대료 등)

□ 공사비 증감 현황

구 분	*******			**
	***	***	***
총 공사비	*************	*************	************
도 급 비	*************	*************	************
관 급 비	**********	**********	***********
이 전 비	**********	**********	***********

4		조치계획

□ 설계변경도서 검토결과 설계변경 내용이 적정한 것으로 판단   되어 상기 겸토결과와 같이 설계변경 시행코자 함.

5		향후계획

□ ’20.12.16 : 설계변경 계약 의뢰

□ ’20.12.22 : 공사준공

붙임  1. 건설사업관리용역 책임사업기술자 설계변경 현황 검토보고서 1부.

2. 설계변경(1회) 자문회의 개최결과 1부.

3. 계약금액조정 검증확인서 1부. 끝.