문서번호	시설관리과-24594
결재일자	2020. 12. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
김재현	양창진	유명은		12/15 정진일
협 조

『2020년 전기설비 유지보수 공사(장기계속)-장기1차』

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

2020. 12.

강서수도사업소

〔시설관리과〕

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『2020년 전기설비 유지보수 공사(장기계속)-장기1차』

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

우리사업소에서 시행 중인「2020년 전기설비 유지보수 공사(장기계속)-장기1차」건에 대한 설계변경 심의위원회를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ	사업개요

○ 공  사  명: 2020년 전기설비 유지보수 공사(장기계속)-장기1차

○ 공사기간: 2020. 04. 01. ～ 12. 31.

○ 총부기금액: ***************************

- 1차수 계약금액 : ****************************

- 2차수 계약금액 : *************************

○ 계약상대자: ****************

○ 공사규모

- 아리수올림터·배수지 등 노후 전기설비 교체 및 긴급 복구공사

Ⅱ	설계변경 내역

○ 설계변경 사유

- 전기설비 유지보수에 따른 신규공종 및 시공물량 증·감 발생

- 미집행 보험료(건강, 연금 등) 정산(감액) 시행

○ 주요 계약물량 증감

구 분	공 종	비 고
물량 감소	접지동봉(Φ16×1800L 1본) 등 143개
물량 증가	저독성난연가교폴리올레핀절연전선(옥외)(450/75OV HFIX 4㎟, 연선) 등 9개
신규 공종	강제전선관_옥외_철거(아연도 22 mm) 등 38개

○ 계약금액 변경

구 분		당 초	변 경	증·감	비 고
총 부기금액		************	************	변동없음	총 계약금액 변동없음 → 물량증감
1차수	‘20년 계약금액	************	************	감)11,957,940원
2차수	‘21년 계약금액	************	************	증)11,957,940원

Ⅲ	설계변경 심의

○ 심의일시 : 2020. 12. 15(화) 10:00  4층 회의실

○ 심의내용 및 결과

- 설계변경 타당 여부 : 타당함

- 신규공정 적정 여부 : 적정함

- 공정별 계약물량 증감 및 계약단가 적용 적정 여부 : 적정함

- 제경비 적정 산정 및 적용 적정 여부 : 적정함

Ⅳ	행정사항

○ 설계변경 시행 후 우리사업소 행정지원과에 변경계약 의뢰

붙 임 : 1. 설계변경 심의결과서 1부

2. 변경내역서 1부

3. 물량증감표 1부.  끝.