과 장		12/15 이수범	심사자	유진석		설계자		하승환	설 계		심 사		결 재
									2020년 12월 15일		2020년 12월 15일
변 경 설 계 서
	공 사 명 : 2020년 포장도로 긴급복구공사(연간단가, 정산설계변경(2회))
	구 분				금 액							비 고
					당 초		변 경			증 ․ 감
	총 공 사 비				*****************		*****************			**************
	공사비	공 급 가 액			*****************		***************원			***************
		부 가 가 치 세			***************		***************			**************
		전자카드근무관리시스템			***		************			************
		계			*****************		*****************			**************
	관 급 자 재 비				***************		***************			**************
	이 전 비				********		********			***
설계변경 개요 : 절삭후 아스팔트 덧씌우기(t=5~10cm) 33a → 19.39a, 소파보수(t=5cm) 184a → 209.94a 공동복구(채움재 주입포함) 45개소 → 20개소, 야간긴급출동대기 1,898hr → 1,910hr