문서번호	시설보수과-4584
결재일자	2020. 12. 15.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장		난지물재생센터소장
김승조	우배용	조선행		12/15 한성현
협 조

-2020년 불광천/홍제천 차집관로 물막이공사-

제1차 설계변경 보고

2020. 12.

시설보수과

- 2020년 불광천/홍제천 물막이공사-

제1차 설계변경 보고

우리 센터에서 시행중인 2020년 불광천/홍제천 차집관로 물막이공사 관련하여 물량 변경에 따른 설계변경에 대한 보고임.

□ 공사개요

가. 공 사 명 : 2020년 홍제천 불광천 차집관로 물막이공사-난지

나. 공사위치 : 홍제천 우안, 불광천 좌.우안

다. 공사기간 : 2020. 06. 08 ~ 2020. 12. 23

라. 공사개요 : 차집관거 물돌리기 불광천 (3개구간, L=1,441m)

홍제천 (3개구간, L=1,416m)

마. 공 사 비 : 1,220,418,900원

바. 시 공 사 : 장원건설주식회사 대표 권지영, 대지산업건설 대표 류춘범

사. 발 주 청 : 난지물재생센터 시설보수과

□ 설계변경 현황

가. 변경사유 : 현장 실정보고 및 발주청 추가 작업지시

나. 변경내용

1) 발주청 추가공사 요청

- 관련근거 : 시설보수과-3997(2020.11.11.)호

- 내    용 : 물막이 구간내 맨홀확경 추가작업 지시

2) 현장실정보 및 승인

- 관련근거 : 공사감독1처********0.12.08.)호 실정보고

시설보수과-4461(2020.12.10.)호 승인

- 내    용 : 물막이 장비 및 자재 수량조정, 양수기 거치대 반영

맨홀확경 규격 변경, 현장사무실 임대료 반영

고용개선지원금 반영, 불광천 준설 필요.

3) 설계변경 심의결과 반영

다. 주요공종 수량 변경(증·감) 현황

공 종	규 격	단위	수 량		증·감
			당 초	변 경
담수용수조 제작	2.2*2.4*2.4	개소	6	1	감 5
3Q 및 역지블럭 차수장지 제작	1.8*1.05	개소	6	2	감 4
3Q 및 역지블럭 차수장지 제작	2.2*1.05	개소	6	2	감 4
유압차수장지 제작	1.8*1.8	개소	6	1	감 5
맨홀확경		개소	-	13	증 13

라. 공사비 변경(증·감) 현황

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증·감
도급비	공급가액	1,109,471,728	1,192,060,000	증) 82,588,272
	부가가치세	110,947,172	119,206,000	증) 8,258,828
	계	1,220,417,900	1,311,266,000	증) 90,847,100

□ 공사기간 연장에 대한 검토 보고

1) 준공기한 연기사유

- 여름철 수해방지기간 하천공사 통제(5.15~10.15)로 인하여 절대공기 부족

2) 준공기한 연기

구 분	당 초	변 경	비 고
공사기간	2020. 06. 08. ∼ 2020. 12. 23	2020. 06. 08. ∼ 2021. 05. 14

3) 연기사유 귀책소재 : 발주청

4) 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 예산 및 예산과목

○ 예산액 : 2,000백만원(2020년 불광천/홍제천 물막이공사 본예산 2,000백만원)

○ 예산확보 방안 : 추가소요 예산 91백만원은 불광천 홍제천 물막이 공사 잔액으로 계약

□ 조치계획

○ 설계변경 시행 후 재계약 및 준공 신청시 처리토록 함

붙임  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경(정산) 내역서 1부.  “끝”.