문서번호	급수운영과-19461
결재일자	2020. 12. 15.
공개여부	부분공개(8)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
이승우		12/15 최춘근
협 조

설계변경(최종) 심사요청에 따른 보고 (테헤란로 장기사용 송배수관 정비공사)

2020년 12월

강남수도사업소(급수운영과)

설계변경(최종) 심사요청에 따른 보고

우리사업소에서 시행하는 “테헤란로 장기사용 송배수관 정비공사”의 계약물량 증․감 등 변경사항이 발생되어 본부 안전총괄과에 설계변경 심사요청하고자 함.

□  공사개요

□ 공 사 명: ******************

□ 공사개요: *********************

□ 계약기간: *************************

□ 도 급 비: ***************

□ 도 급 자: **************

□  설계변경 현황

□ 설계변경 사유: 시공물량 증․감 및 신규공정 발생에 따른 계약물량 조정

□ 주요 시공물량 증․감 내역

공 종		단 위	당 초	변 경	비 고
토공 (야간)	되메우기(인력)	㎥	***	***	****
	인력 터파기(협소, 지장물)	㎥	***	****	*****
	굴삭기(타이어) 0.6㎥(야간)	㎥	*****	*****	*****
	잔토소운반 (24DT(현장집하장)야간	㎥	*****	*****	*****
	파쇄물운반 (0.6터파기동시상차)	㎥	***	***	*****
부설공 (야간)	주철직관 부설공(D800)	m	*****	*****	*****
	주철(이형관) 부설공(D200)	개소	**	**	*****
	주철(이형관)부설공(D300)	개소	**	***	****
	주철(이형관)부설공(D800)	개소	***	***	****
	K.P 죠인트관 접합공(D800)	개소	***	***	****
	K.P 이탈방지압륜 접합	개소	***	***	****
	주철관 절단공(절단기사용)	개소	**	***	***

공 종		단 위	당 초	변 경	비 고
구조물공 (야간)	원형밸브실 설치공(100mm) (기초CON)1200mm	개소	*	*	**
	원형밸브실설치공(600~800mm) (기초CON)1200mm	개소	*	*	**
	원형밸브실 설치공(D200)	개소	*	*	***
	원형밸브실 설치공(D300)	개소	**	*	***
부대공 (주간)	PE free 휀스 설치및철거	개소	****	****	******
	교통정리원	인	**	**	****
	안전시설 설치 및 철거(간선)	일	***	**	***
	에어탑설치철거	일	*	**	***
	이물질방지공(800mm) 야간	일	*	**	***

□ 신규공정 발생내역

************************************

*****************************

******************

□ 설계변경 내역

구 분	당초 금액	변경 금액	증․감
도 급 비	**************	**************	**************
공급가액	**************	**************	**************
부가가치세	************	************	*************

□  향후 계획

- 계약 물량 증․감 및 신규 공정 발생에 따른 *****************으로 본부 안전총괄과에 설계변경 심사요청하고자함.

붙임 : 설계변경 내역서(최종) 1부.  끝.