문서번호	도로보수과-12634
결재일자	2020. 12. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
이이용		강종훈	12/15 김영철
협 조

2020년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

설계변경 검토보고(최종)

2020. 12.

서부도로사업소

(도로보수과)

2020년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

설계변경 검토보고(최종)

2020년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가) 시행 중 민원사항 발생 및 서울시 사업예산 배정, 무단횡단 금지시설 설치구간 반영(추가) 등으로 인한 사업물량 증가에 따른 설계변경 검토보고 사항임.

□ 관련근거

○ 횡단보도 확충정비사업 예산 재배정  (**********

○ 도로교통 소통 개선사업 예산 재배정 **********

○ 도로부속물 일상 유지관리사업 예산 재배정**********

※ 차선분리대 및 노면표시 설치사업 추가 반영(홍남교 앞 등)

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2020년 교통안전시설(노면표시)유지보수공사(연간단가)

○ 사업기간 : 2020. 3. 25. ~ 12. 31.

○ 도 급 자 : 우리피앤알(주)  대표  인창호

○ 계약금액 :***************

공 종	규 모	비 고
노면표시 (융착식) 도색	49,100
노면표시 (융착식) 재도색	298,080
노면표시 (융착식) 제거	32,000
차도밑 그림	20,020
도로표지병 설치 및 철거	400
교통신호수	433

□ 보고내용

○ 서울시(교통운영과)에서 횡단보도 확충정비사업(5차) 3개구간 사업예산

배정(20,920천원)과     ※ 교통운영과-9061(2020.6.8.)호와 관련임.

○ 도로교통 소통 개선사업 5개 구간 사업예산이 배정(42,700천원)됨.

※ 교통운영과-14867(2020.9.24.)호 및 교통운영과-6510(2020.4.20.)호와 관련임.

○ 간이 중앙분리대 설치 구간(홍남교~사천교) 추가 반영으로 인한 차선폭

조정으로 인한 물량 확대와

○ 노면표시 퇴색 등으로 인한 민원업무 처리, 시공물량 증․감 및 제비율

적용 등으로 인한 변경사항 발생.

□ 설계변경 현황

○ 설계변경 금액                                        (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
****	*************	*************	*************
*****	*************	*************	*************
*****	***********	***********	**************

○ 물량 증․감 내역

공 종	단위	당 초	변 경	증․감	비고
노면표시 (융착식) 도색	m	49,100	78,352	증) 29,252
노면표시 (융착식) 재도색	m	298,080	175,109	감)122,971
노면표시 (융착식) 제거	m	32,000	60,554	증) 28,554
차도밑 그림	m	20,020	78,352	증) 58,332
도로표지병 설치 및 철거	개	40	0	감) 40
교통신호수	인	433	997	증) 564

○ 설계변경 사유

- 서울시(교통운영과)에서 횡단보도 확충 정비사업과 도로교통 소통 개선사업

예산 재배정과 간이 중앙분리대 설치구간 추가 반영으로 인한 차선폭 확대

- 노면표시 퇴색 등으로 인한 민원발생 구간과 제비율 및 물량 증․감 등으로 인한

변경사항에 대해 설계변경 시행하고,

- 각 사업별 시공물량 증․감 사항에 대해 사업예산 변경 추진.

□ 예산과목

○ (교통사업특별회계) 도시교통실 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전 시설물관리, 보행불편

해소를 위한 횡단보도 확충정비사업, 시설비 및 부대비, 시설비(감액: 46,707,880원)

○ (교통사업특별회계) 도시교통체계 및 소통개선, 버스서비스이용제고, 중앙버스전용차로 흐름        개선, 시설비 및 부대비, 시설비(감액: 60,930,000원)

○ (교통사업특별회계) 도시교통실 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리 강화,       교통사고 잦은곳 개선사업,  시설비 및 부대비, 시설비(감액: 11,360,000원)

○ (교통사업특별회계) 도시교통실 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리 강화,         도로교통소통 개선사업, 시설비 및 부대비, 시설비(증액: 21,380,000원)

○ 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물 관리, 도로부속시설물 일상유지관리, 시설비

및 부대비, 시설비(증액: 166,677,880원)

□ 향후계획

○ 상기 보고내용과 같이 설계변경(최종) 정산시행 및 준공검사 처리코자 함.

붙 임 : 설계변경(정산) 내역서 1부.  끝.