투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	한국토지주택공사 사장
(경유)
제목	교통안전표지 원인자부담공사 준공 검토 요청에 대한 회신[위례신도시 택지개발사업 조성공사(4공구) 내 위례대로 교통안전시설물 설치공사(표지)]

1. 한국토지주택공사 서울위례단지사업2부-8710호(2020.12.2.)와 관련입니다.

2. 위례신도시 택지개발사업 조성공사(4공구) 내 위례대로 교통안전시설물 설치공사(표지) 관련, 공사구간 내 교통안전시설물(교통신호기, 안전표지)은 주공정인 도로시설물과 연계된 부속시설물이므로, 도로시설물이 모두 준공(인수,인계)되는 시점으로 공사기간 연장 및 재 준공승인 요청하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	정영권		전문관	代이지영		기전과장	12/16 代이동훈
협조자
시행	기전과-12908	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142	/	www.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	부분공개(7)