문서번호	교량안전과-18882
결재일자	2020. 12. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이제택		박찬규	12/16 代박동욱
협조

『2020년 영동대교 보수공사』

설계변경(제1회) 검토보고

2020. 12.

안전총괄실

(교량안전과)

-  2020년 영동대교 보수공사 -

설계변경(제1회) 검토보고

『2020년 영동대교 보수공사』건설사업관리단의 설계변경(제1회) 검토 도서가 제출 되어 이에 대한 검토 보고임.

□ 관련근거

○ 설계변경 자문회의 운영계획(교량안전과-15181, ‘18.8.29)

○ 감리 실정보고서 검토보고(교량안전과-18321, ‘20.12.9)

○ 설계변경(제1회) 도서제출(한강교량감 2020-553호, ‘20.12.15)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2020년 영동대교 보수공사

○ 공사기간 : 2020. 10. 07 ~ 2021. 05. 30

○ 사 업 비 : 1,327백만원

(도급비 1,172백만원, 관급비 83.6백만원, 이전비 71.2백만원)

○ 시 공 사 : ㈜중앙공사 대표 김태종

○ 공사내용 : 아스팔트 재포장 60.1a, 교면방수 60.1a, 바닥판 상면 단면보수 1,360㎡, 바닥판 치환보수 48㎡, 기타 부대공 1식

□ 설계변경 주요내용

○ 실정보고 승인사항 반영[교량안전과-18321(2020.12.09.)]

- 교면포장 추가 보수물량 반영(17.7a)

·강북방향 S12, 강남방향 S1, S3, 접속교 S17, G램프 GS1

○ 긴급물량 추가보수(민원사항)

- 북단 F램프 요철구간 구배조정

○ 기타 현장여건 변경에 의한 실 시공수량 반영

□ 주요 수량 및 공사비 증,감 현황

○ 주요 공종별 수량 증□감 현황

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

○ 공사비 증. 감 내역                                        (단위 : 원)

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 설계변경 적용단가

○ 계약초과 수량 : 계약단가 적용

□ 검토결과 및 조치의견

○ 건설사업관리단에서 제출한 설계변경(제1회) 검토 도서에 대해 검토결과 적정한 것으로 판단되며, **************대하여는 동 공사의 낙찰차액을 활용하여 설계변경 조치코자 함.

○ 주요공종 대부분이 교면포장으로써 동절기임을 감안 *************에 대하여는 사고이월 시행코자 함.(준공일 ’21.5.30)

□ 향후계획

○ ‘20. 12.     : 설계변경 및 변경계약

○ ‘21.  2.~4.  : 공사시행

○ ‘21.  5.      : 공사준공

붙임 1. 설계변경(제1회) 검토 도서(감리단) 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 제경비 검증 확인서 1부.

4. 실정보고서 검토 보고서 1부.  끝.