“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(기획예산과장)
(경유)
제목	2020회계년도 세출예산 이월 대상사업 제출

기획예산과-13460(2020.12.7)호와 관련하여 우리 사업소 2020회계년도 세출예산 이월 대상 사업을 붙임과 같이 제출합니다.

가. 2020회계년도 사고이월 내역

(단위:천원)

연번	사 업 명	공사기간 (연장기간)	예산현액 (A)	원인행위액 (B)	지출액 (C)	이월액 (원인미필) (D=A-C-E)	불용액 (E)	이월사유
1	신림6배수지 내부방식 공사	2020. 08. 25 ～ 2021. 11. 02	2,679,000	2,309,502	494,890	1,872,112 (57,500)	369,498	- 재심의로 2020.8.25.계약을 체결하여 준공일 21.11.02로 계약된 공사로 절대공기 435일(14.5개월)로 공사 기간이 길어 연내 준공 불가

※이월액=원인필 이월액+원인미필 이월액

붙임 1. 사고이월 요구서 각 1부.

2. 이월사업 명세서 각 1부.

3. 지출원인행위 미필 이월 명세서 각 1부.

4. 계약서(변경계약서) 및 합의서 사본 각 1부. 끝.

	남부수도사업소장
주무관	박창남		행정관리팀장	이영기		행정지원과장	홍기관		남부수도사업소장	12/16 박병성
협조자
시행	행정지원과-26985	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 남부수도사업소 행정지원과	/	arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4413	/전송	02-3146-4479	/		/	부분공개(5)