문서번호	시설관리과-23358
결재일자	2020. 12. 16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
노현식		代오영진	12/16 고신석
협조

설계변경 심의결과 및 변경 시행 보고

(2020년 영등포구 관내 상수도공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 12.

명에 의거「2020년 영등포구 관내 상수도공사(장기계속단가)」에 대하여 설계변경(1회) 심의위원회를 개최하고 심의결과에 의거 아래와 같이 설계변경 시행하고자 보고합니다.

2020. 12.   .

보고자: 지방시설서기 노현식

□ 심의대상

◦ 공 사 명 : 2020년 영등포구 관내 상수도공사(장기계속단가)-1회설계변경

◦ 공사내용 : D=13 ~ 300㎜, L=1,917m

◦ 공사기간 : 2020. 6. 15. ~ 2021. 06. 30.

◦ 수 급 자 : 세정건설  대표 최광호

◦ 도 급 비 : 842,419,510원

□ 심의일시 및 장소

◦ 2020. 12. 15(화) 16:00 2층 시설관리과 사무실

□ 심의내용

◦ 설계변경의 타당성

◦ 신규공종 단가 및 계약물량 증․감 적용 적정여부

- 신규공종 발생  : 콘크리트 포장절단(100~150㎜,야간) 외 19개 공종

- 계약물량 증.감 : 되메우기(환토) 외 127개 공종

◦ 제경비 적정 산정 및 적용 적정성

□ 심의결과

◦ 계약변경 타당

◦ 주요 공종 변경사항 타당

◦ 세부공종 조정내역 타당

◦ 제경비 적용 타당

□ 설계변경

◦ 위 공사 시행중 현장여건 변화에 따라 신규공종 및 계약물량 증․감 발생

- 신규공종 발생  : 보콘크리트 포장절단(100~150㎜,야간) 외 19개 공종

- 계약물량 증.감 : 되메우기(환토) 외 127개 공종

□ 설계변경 및 차수별 계약금액 변경

(단위:원)

구 분	당초 계약금액	변경 계약금액	증 ․ 감	비 고
총 부기금액	842,419,510	842,419,510	-
1차수	716,088,000	379,412,000	감336,676,000
2차수	126,331,510	463,007,510	증336,676,000

□ 조치의견

◦ 심사결과에 의거 설계변경 시행코자 하며 공사준공에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 1. 설계변경 사전심의요청서 및 의결서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 제비율검증 1부.

4. 변경합의서 1부.  끝.