문서번호	운영과-9215
결재일자	2020. 12. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
도형철		최영효	12/16 정훈모
협조

『악취모니처링 시스템용 전광판 설치공사』

설계변경 검토 보고

2020. 12.

중 랑 물 재 생 센 터

(운 영 과)

『악취모니터링 시스템용 전광판 설치공사』

설계변경 검토 보고

우리 센터 「악취모니터링 시스템용 전광판 설치공사」관련 설계변경 요청으로 및 최종정산 처리하고자 함.

Ⅰ

사업개요

□ 공사개요

❍ 사 업 명: 악취모니터링 시스템용 전광판 설치공사

❍ 공사기간: `20. 10. 13 .~ `20. 12. 16.

❍ 계약업체: 주식회사 우형정보통신 대표 김복녀

❍ 계약금액: 금67,985,900원(금육천칠백구십팔만오천구백원정)

❍ 예산과목: 공통분야 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비, 수선유지비(악취 측정기 설치비)

Ⅱ

설계변경 사항

□ 변경내용

구 분		당 초	변 경	증(감)
총 공사비		￦67,985,900	￦63,826,180	-4,159,720
도 급 비	공급가액	￦61,805,363	￦58,023,800	-3,781,563
	부가가치세	￦6,180,536	￦5,802,380	-378,156
	계	￦67,985,900	￦63,826,180	-4,159,720

□ 설계변경 사유

❍ 물량 변동에 따른 설계내역 변경

❍ 전광판 [운영컴퓨터 및 모니터(감 –1,208,248원), S/W 개발비 일부(감 –1,300,000원)]

□ 설계변경 내용

❍ 설계변경내용: 물량 변동 및 경비 정산               (단위 : 원)

비 목		계약금액	설계변경 금액	증감 금액
재료비	재료비 (직)	38,607,444	37,399,196	-1,208,248
노무비	직접노무비	9,683,083	9,683,083	*
	간접노무비	764,964	764,964	*
경비	1. 산재보험료	411,806	411,806	*
	2. 고용보험료	96,051	96,051	*
	3. 건강보험료	367,645	0	-367,645
	4. 연금보험료	496,817	0	-496,817
	5. 노인장기요양보험료	37,684	0	-37,684
	6. 산업안전보건관리비	893,375	871,022	-22,353
	7. 기타경비	2,845,218	2,775,140	*******
일반관리비		3,252,245	3,120,076	-132,169
이윤		2,449,032	2,302,463	-146,569
전광판 소프트웨어개발비		1,900,000	600,000	-1,300,000
공급가액		61,805,363	58,023,800	-3,781,563
부가가치세		6,180,536	5,802,380	-378,156
도금액		67,985,900	63,826,180	-4,159,720

Ⅲ

검토의견

❍ 위와 같이 설계 변경하여 정산처리 추진코자 함

Ⅳ

행정사항 및 향후계획

❍ 설계변경 시행 및 변경계약 의뢰(운영과 ⇨ 관리과)

❍ 준공(감독)조서 시행

붙임  1. 관련공문 1부.

2. 설계(변경)내역서 1부.

3. 전광판 SW 개발비(변경) 산출서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.