문서번호	시설관리과-21653
결재일자	2020. 12. 17.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
주세진		김성호	12/17 이승완
협조

『2020년 수유1동외 8개동 상수도공사』

설계변경 심의 위원회 개최 결과 보고

2020. 12. 17.

북부수도사업소

(시설관리과)

설계변경 심의위원회 개최

『2020년 수유1동외 8개동 상수도공사』시행중 신규공종 및 시공물량 증·감 사항이 발생됨에 따라 설계변경 심의 위원회를 개최하여 심의완료하고 그 결과를 보고드림.

1		일 반 현 황

□ 공 사 명 : 2020년 수유1동외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)

□ 공사개요

○ 당 초 : D=13~300mm, L=1,333m

○ 변 경 : D=13~300mm, L=1,335m

(신규공종 및 물량증감 발생 – 설계변경 사유서 참조)

□ 공사기간 : 2020.05.21. ~ 2021.6.31.

□ 도 급 액

○ 당 초 : *************

○ 변 경 : *************

□ 도 급 자 : ************

2		심의회 개최

※ 관련근거 : 서울특별시 계약심사 처리규칙 및

2018년 상수도사업 계약심사 추진계획(재무회계과-915,2018.01.22.)

□ 심의일정 : 2020.12.17.(목) 14:00

□ 심의장소 : 북부수도사업소 시설관리과

□ 심의위원 : *************

********************************

3		심 의 내 용

□ 신규공종 및 계약물량 증·감에 따른 설계변경

○ 수량변동 및 단가적용의 적정성 여부

○ 계약변동(증·감) 수량 및 단가 낙찰률 적용 적정 여부

○ 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

4		설계변경 내역

****************************************************************************************************************************************************

************************************************************************************************************************************************************************************* □ 차수 별 계약금액변경

□ 신규공종 및 시공물량 증·감에 따른 변경

○ 신규공종 발생

- 잔토처리(0.7 상차 비별도) 외 66개 공종 발생

○ 공사 중 물량 증·감 사항 발생

- 아스팔트 포장절단(200㎜이하) 외 120개 공종 감소

- 콘크리트 포장절단(100~150㎜) 외 128개 공종 증가

5		행 정 사 항

□ 설계변경 심의 검토결과를 반영 설계변경 방침 후 재계약 의뢰하고자 함.

붙임  1. 설계변경 심의결과서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.  끝.