문서번호	급수운영과-27041
결재일자	2020. 12. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
강병국	주은선	代문병희	12/17 정진일
협 조

설계변경 보고서 제출에 따른 검토보고

[목동배수지입구~신목중삼거리간 외1개소 장기사용 송배수관 정비공사]

2020. 12.

급수운영과

「목동배수지입구~신목중삼거리간 외1개소 장기사용 송배수관 정비공사」

설계변경 보고서 제출에 따른 검토보고

『목동배수지입구~신목중삼거리간 외1개소 장기사용 송배수관 정비공사』와 관련하여

서울시설공단으로부터 설계변경 검토보고가 제출되었기에 아래와 같이 검토 후

결과를 보고드림.

※관련대호 서울시설공단 공사감독2처-20521(2020.12.17.)호

2020. 12. 17.

보고자 시설6급 강병국

□ 공사개요

○ 공 사 명: 목동배수지입구~신목중삼거리간 외1개소 장기사용 송배수관 정비공사

○ 공사개요: *********************

○ 공사기간: `20. 5. 11. ~ `20. 12. 30.

○ 공사금액(도급액): ***************

○ 시 공 사: ***************

○ 감 독 자: 서울시설공단 공사감독2처 ***

□ 설계변경 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 법률 제22조 및 동법 시행령 [제74조(설계변경으로 인한 계약금액 조정)]

○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준, 행정자치부 예규 제67호(2016.10.4.)

[제13장 공사계약 일반조건 제6절 공사 설계의 변경 및 제7절 계약금액의 조정]

□ 공단 설계변경 심의 현황

구 분	심의요청 사유	심사일자	주요 심사내용(요약)	비고
공단 자체심의	신 규 공 종 및 수량 산출 적정성 심의	2020. 12. 17.	***************************** ********************* ******************* ******************************* *************************** ***************************** ******************* ************************** ******************************** ******************************************************************************** ******************************* *************************************************************

□ 공단 보고내용

○ 설계변경 시행근거

- 공사현장 상태와 설계서 상이로 인한 변경

연번	구 분	주요 변경내용	관 련 근 거
1	굴착 단면 변경	******************************* ***********************************	********** *************************
2	매설 심도 변경	***************************** **********************************	********** *************************
3	공법 변경	*********************** **************************	********** ***************************
4	수량 증가	************** ***********************	********** ***************************

- 제경비 등 실 사용액 정산에 의한 변경

연번	구 분	주요 변경내용	공사비 증ㆍ감	관 련 근 거
1	각종 보험료 등 정산	*************************** *******************	**********
2	산업안전보건관리비	********************	*********
3	주요 사급자재 정산	********************** ***************** *********************	**********

○ 주요 변경 내용

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증, 감
상수도관 매설	D80~600㎜	m	1,533	1,312	감)221
밸브실 설치	D80~1000mm	개소	49	38	감)11
무단수 차단	D300~1350mm	개소	1	3	증)2
폐쇄관 충진공	20㎏/㎤	㎥	33	301	증)268

○ 설계변경으로 인한 계약금액 조정

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
도급비	공 급 가 액	*************	*************	*************
	부가가치세	***********	***********	************
	계	*************	*************	*************

□ 조치의견

상기와 설계변경 건에 대하여 실정 보고 및 변경내역서 검토 결과 현장 여건에 따른 물량 증감 및 도급액 변경이 타당하다고 판단되어 서울시설공단 의견대로 설계변경 하고자 함.

□ 행정사항

○ 사업소 자체 설계변경 심의위원회를 개최하여 심의결과에 따라 설계변경 추진

○ 준공검사원 접수 후 정산처리

붙임  1. 공단 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 등 관련서류 각 1부.

3. 검증확인서 1부.  끝.