문서번호	기전과-13154
결재일자	2020. 12. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
정영술		서수일	12/17 김영철
협조

설계변경 검토 보고(3차)

-2020년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)-

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 12.

서부도로사업소

(기전과)

설계변경 검토 보고(3차)

-2020년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)-

2020년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가) 관련 작업완료에 따른 시공물량 증·감 사항 반영 및 미사용 보험료 등 제경비를 정산하여 설계 변경코자 함.

□ 관련 근거

○ ㈜서우TEC 서우제 2020-394(2020. 11. 17.)호-3차 설계변경 제출

□ 공사 개요

○ 공사명: 2020년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)

○ 공사위치: 서부도로사업소 관내(시도)

○ 공사내용: 교통안전표지 신설, 교체, 철거, 이설 등 1식

○ 계약금액: 금100,706,000원

○ 공사기간: 2020. 2. 17.∼2020. 12. 31.

○ 계약업체: ㈜태성트라텍   대표 임태규

○ 감리업체: ㈜서우TEC

○ 예산과목: 도시교통본부 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전

시설물 관리, 교통안전표지 설치 및 유지보수, 시설비(401-01)

□ 설계변경(정산) 금액

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감
공사비		100,706,000	96,787,000	감)3,919,000
도급비	공급가액	91,550,910	87,988,183	감)3,562,727
	부가가치세	9,155,090	8,798,817	감)356,273

□ 설계변경(정산) 내역

구 분		설계 변경(정산) 내용	증·감
재료비(물량변경)		- 재료비: 46,249,442원→41,544,163원 (수량 604→788)	감)4,705,279원
노무비		-23,395,080원→27,678,668원	증)4,283,588원
제경비	기계경비	-1,629,134원→1,203,764원	감)425,370원
	산재․고용보험료	-산재보험료: 872,636원→1,032,414원 -고용보험료: 203,537원→240,804원	증)159,778원 증)37,267원
	환경보전비	- 548,657원 → 0원	감)548,657원
	건강․연금보험료 등	-건강보험료: 690,465원→ 0원 -연금보험료: 931,662원→ 0원 -노인장기요양보험료: 70,773원→ 0원	감)1,692,900원
	기타경비	-6,337,651원→ 0원	감)38,374원
	산업안전보건관리비	-1,238,631원→ 0원	감)1,238,631원
고재처리		- 고재처리: -1,664,829원→-844,107원 (수량 314→232)	증)-820,722원
기 타		-제경비 정산에 따른 일반관리비, 이윤 등 정산	감)571,144
합 계		-100,706,000원 → 96,787,000원	감)3,919,000원

□ 설계변경 사유

○ 작업완료에 따른 공사물량 증·감사항 반영 및 미사용 보험료 등 제경

비 정산

□ 행정사항

○ 설계변경 내역에 대하여 변경계약 요청→ 관리단속과

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 제비율검증확인서 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 설계변경(감리검토) 문서 1부.  끝.