문서번호	교통운영과-9774
결재일자	2020.6.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교통안전팀장	교통운영과장
손태빈		김세교	06/22 강진동
협조

‘20년 교통시설안전진단 및 실시설계용역 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 6

‘20년 교통시설안전진단 및 실시설계용역 시행계획

「교통사고 사망자 줄이기 추진계획」관련, 중대한 교통사망사고 지점에 대한 2020년 교통시설안전진단 및 실시설계용역을 추진하여 사망사고 예방에 만전을 기하고자 함

1				사업개요

추진근거

❍『교통안전법』제34조(교통시설안전진단), 제50조(교통사고 원인조사)

❍ 교통사고 사망자 줄이기 추진계획(1부시장 방침, 2013.7.19)

추진방향

교통시설안전진단

: 3개소

❍ 기준 : 최근 3년간(’16~’18년) 교통사망사고 3건 이상 지점이거나, 중상 이상의 교통사고 10건 이상 발생지점 중 교통시설에 문제가 있다고 의심되는 지점 (교통안전법 시행령 별표5)

- 1차 조사(’18.4~5월) : 사망사고 집중발생지점 6개소 도면 검토

- 2차 조사(’18.6월) : 도면검토 후 현장조사를 통해 개선이 시급한 지점 3개소 선정

연번	관리번호 (사고 일자)	지점명	사망건수/ 중상건수 (최근3년간)	주요 사고원인	교차로 형태
1	2017-(‘17.03.18) 2018-(‘18.05.18) 2019-('19.09.12)	서대문구 수색로 구간 (가좌삼거리~사천교동측) (서대문구남가좌동102-24~ 북가좌동487)	3건/10건	보행자무단횡단 신호위반 안전운전불이행등	평면 3지교차 및 도로구간 왕복8차로
2	2017-(‘17.10.02) 2018-(‘18.02.14) 2019-('19.05.02)	서대문구 연희로 구간 (힐튼호텔교차로서측~ 홍은교차로서측) (서대문구홍은동201-1∼ 홍은동217-5)	3건/16건	보행자무단횡단 보행자보호위반 차로위반등	평면 4지교차 및 도로구간 (교각) 왕복6차로
3	2017-(‘17.10.24) 2019-(‘19.07.30) 2019-('19.08.29) 2019-('19.11.02)	서대문구 세검정로 구간 (홍은교차로동측∼ 문화촌교회앞교차로서측) (서대문구홍은동48-178∼ 홍제동266-232)	4건/11건	보행자무단횡단 중앙선침범 차로위반등	평면 3지교차 및 도로구간 (커브) 왕복5차로

❍ 시행절차

- 2020년 교통시설안전진단 및 실시설계 시행, 2021년 공사시행

사고지점 현장 합동조사		사고지점 종합분석		실시설계
조 사 자 : 시 , 계약상대자 조사내용 : 교통안전시설 미비 등		단기․중기(진단 등) 개선안 수립		실시설계 : 진단, 기술검토 지점

2				추진방법

발주방법 : 협상에 의한 계약(제안서 평가)

❍ 입찰 참가 자격

-『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』제13조 및 같은 법 시행규칙 제14조의 규정에 의한 참가자격을 갖춘 업체

-『교통안전법』제39조 규정에 따라 교통안전진단기관으로 등록 되어있는 업체

-『엔지니어링산업진흥법』제21조 및 같은 법 시행령 제3조의 규정에 따라 건술부문 중 2개 전문분야(도로 및 공항, 교통)에 사업자로 신고를 필하였거나『기술사법』제6조 규정에 의하여 건설부문의 2개 직무 범위에(도로 및 공항, 교통) 등록하고

- 전력기술관리법 제11조, 제14조 및 같은 법 시행규칙 제25조의 규정에 의한 전문 설계업 2종(종합설계업·전문설계업 1종 포함)을 등록한 업체

❍ 기술 상호보완을 위하여 공동도급 가능(공동이행 또는 분담이행)

소요예산 : 76,780천원

- 산출근거 : “붙임” 설계내역서

용역기간 : 2020년 12월 11일 까지

예산과목(교통사업특별회계)

- 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리 강화,

교통사망사고 줄이기 사업, 시설비(401-01)

3				세부 추진계획

❍ ’20.6. ~  7. : 기술용역 타당성 검토 및 발주

❍ ’20.8. ~ 12. : 교통시설안전진단 및 실시설계 용역시행

진단지점 검토 회의 및 교통안전시설 심의

❍ ’21.3. ~ 10. : 교통시설안전진단 지점 예산 재배정 및 공사시행

붙 임 : 1. 교통시설안전진단 검토 대상 및 선정 지점 목록 각1부.

2. 설계내역서 및 과업내용서 각1부. 끝.