문서번호	시설관리과-21672
결재일자	2020. 12. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
이태화		박미영	12/18 이승완
협조

【2020년 미아동외 4개동 상수도공사(1차)】

설 계 변 경  심 의 위 원 회  개 최

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 12.

북부수도사업소

〔시설관리과〕

【2020년 미아동외 4개동 상수도공사(1차)】

설계변경 심의위원회 개최

우리사업소에서 시행중에 있는“2020년 미아동외 4개동 상수도공사(장기계속단가 계약)”에 대하여 시공물량 증·감이 발생됨에 따라 설계변경 심의위원회를 개최하여 검토하고자 함.

1. 일 반 현 황

가. 공 사 명 : 2020년 미아동외 4개동 상수도공사(장기계속단가계약)(1차)

나. 공사개요

당  초 :  D=13∼300㎜, L=1,144m

변  경 :  D=13∼300㎜, L=1,270m

다. 공사기간 : 2020. 6. 10.~ 2020. 12. 31.(총부기기간 : 2020. 6. 10. ~ 2021. 6. 30.)

라. 도 급 비

***************************************

***************************************

마***********************

2. 설계변경 심의위원회 개최

가. 심의일정 : 2020년 12월 18일(금) 15:00

나. 심의장소 : 북부수도사업소 시설관리과

다. 심의위원 : 위원장(시설6급 박미영)

위  원(시설6급 유명수, 시설6급 조광희, 시설6급 김정훈)

※ 관련근거 : 서울특별시 계약심사업무 처리규칙 및

2018년 상수도사업 계약심사 추진계획(재무회계과-915, 2018.1.22.)

3. 심 의 내 용

가. 계약물량 증·감에 대한 설계변경 사항으로 단가계약공사의 특성상 발생

- 수량변동 및 단가적용의 적정성 여부

나. 계약변동 (증·감)수량 단가 낙찰률 적용범위내 적용 적정여부 등

다. 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

4. 설계변경 내역

구 분	당초(원)	변경(원)	증·감(원)	비 고
도 급 비	430,470,160	430,470,160	-
공급가액	391,336,510	391,336,510	-
부 가 세	39,133,650	39,133,650	-

가. 시공물량 증,감에 따른 변경

- 물량 증가 : 고압블록 포장걷기 외 116개 공종

- 물량 감소 : 아스팔트깨기 외 9개 공종

- 신규 공종 : 스테인레스 절단공(기존관) 외 39개 공종

5. 행 정 사 항

○ 위와 같이 설계변경 사항에 대하여 적법성 여부를 검토 및 심의하고

○ 심의 검토결과에 의거 설계변경 반영 조치하고자 합니다.

붙임  1. 설계변경 사유서 1부

2. 설계변경 심의 신청서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.  끝.