문서번호	정수시설과-11423
결재일자	2020. 12. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
이민화		이천영	12/18 김윤수
협 조

“아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다”

2020년 광암아리수정수센터

전기설비 유지보수 공사(장기계속) 설계변경 보고

2020. 12.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

2020년 광암아리수정수센터

전기설비 유지보수 공사(장기계속) 설계변경 보고

우리 정수센터에서 시행 중인『2020년 전기설비 유지보수 공사』의 물량 증․감 및 신규공종이 발생하여 아래와 같이 설계 변경을 시행하고자 보고 드림

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 2020년 광암아리수정수센터 전기설비 유지보수 공사

○ **********************************

○ *******************

- *******************************

- ******************************

○ 계약업체 : *************

○ 공사내용 : 정수센터 전기설비 예방정비 및 고장 발생시 긴급 보수

□ 설계변경 사유 및 내용

○ 작업지시에 따른 시공 물량 증․감 및 신규공종 발생

○ 계약금액 (변동 없음)

구 분		당초 금액	변경 금액	증․감	증감금액	비고
총 공 사 비		59,977,640원	59,977,640원	*	*
도급비	공사가액	54,525,128원	54,525,128원	*	*
	부가가치세	5,452,512원	5,452,512원	*	*
	합 계	59,977,640원	59,977,640원	*	*

○ 신규공종 주요내용

- 약품탱크(PAC #1,#2,#3) 전동밸브 인입전원 및 제어반 신설

- 사여과지, 활성탄흡착지, 정수지입구 주변 해충포집기 31대 설치

- 정수약품 투입시설 누액감지기 5개소 및 제어반 1대 신설

- 오존설비동 액체산소탱크 피뢰설비 접지저항 보강

- 정수지(1~4지) 전동밸브 조작반 배관교체 및 광케이블 재포설

※ 세부사항 설계변경내역서 붙임 참조

□ 조치의견

○ 완료 작업 건에 대해 실제 시공물량 정산 및 신규발생 공종들을 반영하고, 남은 계약기간동안(~2021.3.31.) 안정적인 전기설비 유지보수를 위하여 계약금액 변경(증․감)없이 설계 변경코자 하며,

○ 상기 변경 사항에 대하여 자체 설계변경 심의위원회를 개최 후 심의 결과를 반영하여 변경 계약 후 기성 준공처리하고자 함.

□ 향후계획

○ 설계변경 심의위원회 개최

- 개최일시 : 2020. 12. 18.(금) 15:00 ~

- 심의위원

· 위원장 : 정수시설과장

· 위  원 : 공업6급 지동성, 공업6급 송재홍, 시설6급 박종민, 시설9급 정덕교

- 주요 심의내용

· 설계변경 타당성

· 공종별 물량변경에 따른 설계변경의 적정성

○ 설계변경 및 변경계약

○ 준공처리

붙임 1. 설계변경 내역서(총차, 1차) 1부.

2. 설계변경 검토의뢰서 1부.

3. 설계변경 심의위원회 개최의견서 1부.

4. 검증확인서 1부.  끝.