문서번호	급수운영과-19517
결재일자	2020. 12. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	급수관리팀장		급수운영과장		강동수도사업소장
송정호	양재덕		代양재덕		12/18 안병희
협 조

『잠실동 175 외 3개소 배급수관 정비공사』 관련 미끄럼방지 포장재 납품기한 연기 검토 보고

2020. 12.

강동수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

『잠실동 175 외 3개소 배급수관 정비공사』관련

미끄럼방지 포장재 납품기한 연기 검토 보고

우리 사업소에서 시행 중인「신천동 먹자골목 미끄럼방지 포장재 복구 공사」와 관련하여 납품기한 연기 검토 결과를 보고 드림.

Ⅰ		구매개요

품명: 미끄럼방지 포장재(t=3㎜) 스탬프

계약자: 주식회사 승진  대표 이상은

납품기한: 2020. 11. 20.~2020. 12. 20.

계약금액: 80,155,510원

Ⅱ		추진현황

송파구청 도로과로부터 배급수관 정비공사 구간에 있던 미끄럼방지 포장재 복구 요청공문 접수(2020. 10. 28.)

미끄럼방지 포장재 복구 계획 방침 수립(2020. 11. 6.)

조달구매 계약 체결(2020. 11. 20.)

공정: 70% (압인공정 100%, 도색공정 20%)

Ⅲ		납품기한 연기사유

미끄럼방지 포장재 포장 공사는 영하의 기온 및 물기가 있는 습윤상태에서는 공사진행에 어려움이 있는 바, 최근 한파(-11℃~ -5℃)와 적설로 인하여 납품기한 연기가 불가피한 실정 임.

Ⅳ		조치계획

○ 위와 같은 사항으로 납품기한 연기가 불가피하여 아래와 같이 납품기한을

연기하고자 함.  끝.

▷ 당초: 2020. 11. 20.~2020. 12. 20.

▷ 변경: 2020. 11. 20.~2020. 12. 29.

○  지체상금 부과여부: 미부과

▷ 근거: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제90조(지연배상금)

(계약상대자의 책임 없는 사유로 계약이행이 지체되었다고 인정될 때).  끝.