문서번호	급수운영과-25140
결재일자	2020. 12. 18.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
신정우	박장진	12/18 채재일
협 조

「북한남 삼거리 ~ 한남테니스장간 송배수관 정비공사」

설계변경 보고에 따른 검토 보고서

2020. 12

중부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

『북한남삼거리~한남테니스장간 송배수관 정비공사』

설계변경 보고서 제출에 따른 검토 결과 보고

1. 공사개요

가. 공사  기간 : 2020년 5월 6일 ~ 2020년 12월 29일

나. 도  급  액 : 801,496,440원

다. 공사 개요 : D=300~900mm, L=642m

라. 도 급 자 : 모원건설주식회사 대표 성효숙

마. 발 주 청 : 중부수도사업소(급수운영과)

2. 주요 설계변경 내용

가. 사토장 변경

‣ 수도권 매립지 부적합 판정에 따른변경(급수운영과-19861)

나. 교통량 검지센서 재설치

‣ 공사구간내 ASP 캇타에 따른 교통량 검지선 재설치(급수운영과-23172)

다. 토공 및 부대공 수량증가

‣ 지하매설물 및 포장균열 등에 의한 확폭 및 중앙차로 시공에 따른 양방향

안전시설 설치 등에 따른 증가(급수운영과-23172)

라. 폐기물량 증가

‣ 확폭 및 일부구간 아스콘 두께 상이에 따른 증가(20cm → 60cm), 실정보고

마. 공기밸브 규격 변경

‣ D=150mm → D=200mm

3. 설계변경 검토 사항

*****

******************************************

*****************************************************

***********************************************

*********

**********************************

********************************************

*******

***************************************

*************************

********

********************

**************************************

**********

*******************************

*************************************

6. 조치의견

위와 같이 검토사항에 대하여 서울시설공단에 설계변경에 반영토록 통보코자 함. 끝.