“기분 좋은 변화, 품격 있는 강남”

등록번호	공원녹지과-32119		주무관	공원기획팀장		공원녹지과장		도시환경국장
			이덕신	주동희		김현경		12/18 안재혁
등록일자	2020.12.17.
결재일자	2020.12.18.
공개구분	대시민공개
			협조자

돌산근린공원 조성 기본계획 변경용역 사고이월 계획

2020.  12.   .

	강 남 구
(		공원녹지과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	•
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 도시계획시설 변경 절차이행에 따른 기간소요로 사고이월 불가피함
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 적정
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 주민 등 다수
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ○ ) ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 해당사항 없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당사항 없음

돌산근린공원 조성 기본계획 변경용역 사고이월 계획

우리구에서 시행 중인 「돌산근린공원 조성 기본계획 변경용역」과 관련하여 도시관리계획변경 및 공원조성계획 결정에 따른 절차이행 지연에 따라 아래와 같이 사고이월하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		용역개요

❍ 용 역 명: 돌산근린공원 조성 기본계획 변경용역

❍ 용역기간: 2020.03. 23. ~ 2021.12.17.

❍ 용역내용

- 공원조성 기본계획 변경(필요시 공원분류 변경 검토, 근린공원→체육공원)

- 도시계획시설(도로) 결정 등(B=10m, L=100m / 1,000㎡)

❍ 도 급 비: 금118,143,000원

❍ 도급업체: ㈜서우티이씨 대표 강대신

Ⅱ		추진경위

❍ 2020.  2. 10. : 돌산근린공원 조성 기본계획 변경용역 시행

❍ 2020.  7. 22. : 주민설명회 (세곡동 주민센터)

❍ 2020.  8. 13. : 도시관리계획(안) 열람공고

❍ 2020.  9. 17. : 도시계획시설(공원) 세분변경 관련 구의회 의견청취

❍ 2020. 10. 21. : 구 도시계획위원회 자문

Ⅲ		사고이월 상세

❍ 세부내역

세부 사업명	2020 회계연도 예산			지출원인행위 (2020.12.17.기준)	지 출 액 (2020.12.17.기준)	2020 회계연도 이월예산		집행 잔액	이월 사유
	통계목	예산 현액	배정액	금 액	금 액	이월액	준공예정 년월일
	(과목코드)
총 계		4,245,071,000	292,172,000	258,688,300	190,545,300	68,143,000	-	3,986,382,700	-
돌산근린공원 보상 및 조성	시설비	4,245,071,000	292,172,000	258,688,300	190,545,300	68,143,000	2021.12.17.	3,986,382,700 (명시이월 예정)	법적 절차 이행
	401-01

❍ 사고이월 사유

- 2020. 3. 23. 용역착수 후 사업 추진 중으로 주민설명회, 강남구의회 의견청취, 구 도시계획위원회 자문 등 법적 사전절차이행 기간소요

- 코로나19로 인한 서울시도시공원위원회 자문(12월예정) 연기 등 도시공원위원회 심의․자문절차 이행에 따른 기간소요 등으로 사고이월 필요

❍ 예산과목

- 공원녹지과, 도시개발, 공원조성 및 정비, 돌산근린공원 보상 및 조성, 시설비 및 시설부대비, 시설비

Ⅲ		보고자의견

❍ 상기와 같이 사고이월하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임: 1. 사고이월 요구서 1부.

2. 계약서 1부

3. 지출집행(원인행위) 증빙서류 1부. 끝.