문서번호	도로보수과-7842
결재일자	2020. 12. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
유진석		이수범	12/20 代홍성우
협조

[2020년 포장도로 굴착복구공사(연간단가) - 성동]

제2회 설계변경(정산) 검토 보고

2020. 12.

성동도로사업소

(도로보수과)

[2020년 포장도로 굴착복구공사(연간단가)]

제2회 설계변경(정산) 검토 보고

관내 각 유관기관의 굴착공사 시 관리청복구의뢰 물량 증∙감으로 인한 변경 사항에 대하여 설계변경을 시행하고자 보고드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2020년 포장도로 굴착복구공사(연간단가) - 성동

○ 규    모

- 소규모 포장복구 154a

- 차로단위복구 420a

○ 공사기간 : 2020. 4. 9. ~ 12. 31.

○ 도 급 비 : 2,889,810,000원

○ 시공업체 : 송천건설㈜  대표 차 치 영

○ 공 정 률 : 100%

□ 설계변경 근거 및 사유

○ 한국건설관리공사 토목관리처-2654(2020.12.18) : 설계변경(준공) 검토 보고

- 관리청복구의뢰 현장 시공완료에 따른 실 시공물량 증∙감 반영

- 집중호우기간 포트홀 정비 : 도로보수과-4310(2020.8.14)

□ 설계변경 내용

○ 수량 증∙감 내역

공 종	규 격	단위	변 경 내 용			비 고
			당 초	변 경	증 ․ 감
굴착복구	A-1	a	***	******	*******
절삭후 덧씌우기	t=5cm	a	***	******	*******
소규모 포장	(A-Type)	a	*	*****	*******

○ 설계변경 내역

구 분	공사비 증․감 내역(원)			비고
	당초금액	변경금액	증·감
*****	*************	*************	*************
*****	*************	*************	*************
*****	***********	***********	*************
*****	**********	*	*************

○ 예산과목

- 도로시설물관리, 도로굴착복구(도로굴착복구기금), 굴찰복구공사, 시설비 및 부대비, 시설비(3,461,866,670원)

- 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물 관리(도시개발), 노후포장도로정비, 시설비(35,700,000원)

□ 조치의견

○ 건설사업관리기술자의 보고서를 검토한 결과 상기 변경내용과 같이 설계변경을 시행코자 함.

붙임  1. 설계변경 내역서(갑지포함) 1부.

2. 제비율검증 확인서 1부.

3. 감리검토 보고서 1부.  끝.