문서번호	공원시설과-5538
결재일자	2020. 12. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	공원부장
현병철		최연호	12/21 代이정환
협조
	주무관		노성제

『한강공원 난지캠핑장 리모델링 공사(전기)』

기성검사(1회) 결과 보고

2020. 12.

한강사업본부

(공원시설과)

『한강공원 난지캠핑장 리모델링 공사(전기)』

기성검사(1회) 결과 보고

우리본부에서 시행중인 『한강공원 난지캠핑장 리모델링 공사(전기)』에 대하여 아래와 같이 기성준공 처리하고자 함.

공사개요

○ 공 사 명 : 한강공원 난지캠핑장 리모델링 전기 공사

○ 위    치 : 한강공원 난지캠핑장 일대(마포구 한강난지로 28)

○ 공 사 비 : 금475,857,210원

- 도 급 비 : 금404,867,210원

- 관급자재 : 금70,990,000원

○ 공사기간 : ’20.8.10. ~ ’21.3.31.

○ 도 급 자 : ㈜진명연합전설

○ 감 리 자 : 한강사업본부 총무과 전기6급 노성제

기성검사

○ 검 사 일 : 2020. 12. 7.(목)

○ 검 사 자 : 전기6급 노성제, 전기9급 현병철

○ 검사내용 : 기본 공정 및 세부공사 완료 (공정 92%) ※세부내역 별도 첨부

○ 검사결과 : 이상없음

기성검사 내역

○ 금회 기성금 : 353,386,000원

(단위 : 원)

구 분	계약금액 (A)	선금 (B)	전회까지 기성금(C)	금회기성금 (D)	기성금 누계 (E=C+D)	선금 정산액(F)	금회 지출액 (G=D-F)	정산잔액 (H=A-E)
공사비	404,867,210	0	0	353,386,000	353,386,000	0	353,386,000	51,481,210

○ 예산과목

- 한강사업본부 공원시설과, 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원 난지캠핑장 리모델링, 시설비및부대비, 시설비

(예산편성부서 : 한강사업본부 기획예산과)

감리자 의견

○ 한강공원 난지캠핑장 리모델링 전기공사 도급업체의 기성신청에 따라계약서, 설계서 등에 의거 검사한 바 적정한 것으로 사료됨. 끝.

붙임  1. 기성물량표 및 내역서 1부.

2. 기성준공 사진대지 1부.  끝.