문서번호	교량안전과-19148
결재일자	2020. 12. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
송영배		강천수	12/21 하현석
협조

`20년 한강교량일상유지보수공사(2공구)

설계변경(정산) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 12.

안전총괄실

(교량안전과)

`20년 한강교량일상유지보수공사(2공구)

설계변경(정산) 검토 보고

`20년 한강교량 일상유지 보수공사(2공구) 시공물량 증가로 낙찰차액 활용계획에 따라 신규비목, 정산물량, 고용개선지원비, 보험료 등을 반영한 설계변경(정산) 검토 보고 임.

□ 공사개요

○ 공사명 : 2020년 한강교량일상유지보수공사(2공구)

○ 공사규모

- 교면보수(아스팔트) 62a, 교면방수 47a, 신축이음보수 74m

- 균열보수 83m, 표면보수 69㎡, 단면보수 355㎡

- 교량받침재도장 100개소, 차선도색 2,094㎡, 기타1식

○ 공사기간 : `20.1.2.~`20.12.31.

○ 총사업비 : 2,878백만원(도급비2,603, 관급비229,이전비 46)

○ 시공사/사업관리 : 케이투건설산업㈜ 외 1개사/㈜동명기술공단 외 2개사

□ 보고내용

○ 시공물량[작업지시(11~23차)] 변동에 따른 조정물량 및 신규비목에 대한 설계변경 심사결과(원안) 반영[계약심사과-19410(`20.12.10.)]

○ 고용개선지원비(주휴수당, 단말기 사용료) 및 시공물량 정산 반영

- 주휴수당 : 2,946,784원

· 노무비(132,709,500원)×원가반영비율(3.6%)×현장 상시고용비율(14.86%)/상시고용 평균비율(24.1%)

- 단말기 렌탈 비용 : 1,100,000원(VAT제외)

○ 산업안전보건관리비, 보험료 등 정산 반영

○ 관급비 정산 반영(128,455천원)

- 아스콘(WC-6) 895ton, 아스콘(WC-2) 294ton

- 미끄럼방지포장재(t3㎜) 257㎡, 구조물용 충격완충장치(CC1등급) 1개

○ 이전비 정산 반영(60,093천원)

- 폐콘크리트 43.11ton, 폐아스콘 980.28ton

- 혼합폐기물 259.42ton, 혼합건설폐기물 132.87ton

작업시시	변 경 사 유	금 액(천원)		공사비 (증·감)	비 고 (문서번호)
		당 초	변 경
11차(행주)	강재계단 철거 및 설치외 3건 신규비목 및 물량정산 반영	188,589	206,316	17,727	교량안전과-9699(`20.6.29.) 한강교량감2020-441(`20.10.30.)
12차(서강)	강관배관외 6건 신규비목 및 물량정산 반영	141,191	140,789	-402	교량안전과-9920(`20.7.3.) 한강교량감2020-477(11.12.)
13차(양화)	교량보도칼라포장외 10건 신규비목 및 물량정산 반영	148,174	154,495	6,321	교량안전과-11301(`20.7.29.) 한강교량감2020-387(`20.10.8.)
14차(마포)	고탄성매스틱아스팔트조인트외 5건 신규비목 및 물량정산 반영	108,452	158,099	49,647	교량안전과-11738(`20.8.6.) 한강교량감2020-388(`20.10.8.)
15차(양화)	목재 데크설치외 3건 신규비목 및 물량정산 반영	152,588	148,462	-4,126	교량안전과-12437(`20.8.21.) 한강교량감2020-421(`20.10.26.)
16차(동작외8)	추석 비상대기 및 현장순찰	5,170	5,170	0	교량안전과-14304(`20.9.25.) 한강교량감2020-390(`20.10.8.)
17차(동작외7)	배수구, 조인트 유간 청소	41,983	41,340	-643	교량안전과-15137(`20.10.14.) 한강교량감2020-509(`20.11.30.)
18차(서강)	수중단면보수외 3건 신규비목 및 물량정산 반영	144,562	110,347	-34,215	교량안전과-15289(`20.10.16.) 한강교량감2020-540(`20.12.9.)
19차(동작외5)	폐기물운반외 3건 신규비목 및 물량정산 반영	71,113	73,501	2,388	교량안전과-15389(`20.10.20.) 한강교량감2020-510(`20.11.30.)
20차(양화)	수중단면보수외 1건 신규비목 및 물량정산 반영	131,389	165,360	33,971	교량안전과-15619(`20.10.23.) 한강교량감2020-564(`20.12.18.)
21차(마포)	아스팔트 균열보수 등	57,000	52,414	-4,586	교량안전과-15666(`20.10.23.) 한강교량감2020-511(`20.11.30.)
22차(서강)	NFJ외 7건 신규비목 및 물량정산 반영	259,978	248,921	-11,057	교량안전과-16867(`20.11.16.) 한강교량감2020-554(`20.12.15.)
23차(동작)	경고문설치 신규비목 및 물량정산 반영	3,033	3,033	0	교량안전과-18086(`20.12.7.) 한강교량감2020-542(`20.12.10.)
	산업안전보건관리비 반영	31,224	24,186	-7,038
	전체 세부물량 및 보험료 정산 반영	1,118,834	1,428,827	309,993
합 계		2,603,280	2,961,260	357,980

○ 설계변경 내역[정산]

구 분	당 초(천원)	변 경(천원)	비고(증·감)
총공사비	*********	*********	*******
도 급 비	*********	********0	*******
관 급 비	*******	128***5	********
이 전 비	******	******	******

※ 공사기간 변경없음, 신규비목 ************ 적용

□ 건설사업관리자 의견

○「`20년 한강교량 일상유지 보수공사(2공구)」시공물량 증·감에 따른 정산물량, 신규비목에 대한 설계변경 심사결과, 고용개선지원비, 산업안전보건관리비 및 보험료 정산 반영은 사업예산의 효율적 집행을 위해 설계변경(정산)은 타당하다고 판단됨.

□ 검토의견

○ 건설사업관리기술자의 검토의견이 적정한 것으로 판단되며 설계변경(정산) 사항을 승인처리하고 계약의뢰 하고자 함.

붙임  1. 건설사업관리단 실정보고서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 제비율 검증확인서 1부.

4. 설계변경 심사결과 1부.

5. 합의각서 1부.  끝.