문서번호	설비부-20755
결재일자	2020. 12. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
김수진	이종근	12/21 이달영

『동부간선도로 확장(1-2공구) 통신공사』

설계변경 검토 보고(총차 6회, 6차 2회)

2020. 12.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『동부간선도로 확장(1-2공구) 통신공사』

설계변경 검토 보고(총차 6회, 6차 2회)

『동부간선도로 확장(1~2공구) 통신공사』와 관련하여 건설사업관리단으로부터 제출된 설계변경에 대하여 검토하고 보고 드림

1		공사개요

❍ 사 업 명 : 동부간선도로 확장(1-2공구) 통신공사

❍ 공사위치 : 노원구 월계1교 ~ 창동교

❍ 공사기간 : 2008.12.29 ~ 2020.12.31.

❍ 도 급 비 : 1,750백만원

❍ 감 리 단 : (1공구)㈜도화엔지니어링, (2공구)㈜이산

❍ 시 공 사 : ㈜퓨젼아이앤씨

2		검토내용

관련근거

❍ 제 22차 설계변경 자문회의 결과[설비부-20329호(`20.12.15)]

❍ 설계변경 요청 검토 보고(총차,6차)[동부2감-20-785호(`20.12.18.)]

설계변경 주요내용

❍ 설계변경 사유

1) 동부간선도로(2~3공구) 시설물 통합 관리를 위한 광케이블 포설

2) 월계1교~도봉지하차도 구간 영상검지기 추가 반영

3) 무인교통단속장비(구간단속카메라) 반영

4) 지하차도 지자기검지기 상태감시장치(RTU) 반영

5) 지하차도 지자기검지기 광케이블 구성 방식 변경

6) 지하차도 관급자재(영상유고감지설비) 계약 미반영분 반영

7) 지하차도 설계보완에 대한 설계용역비 반영

❍ 설계변경 소위원회 자문회의 결과 반영(조건부 가결)             [단위: 원]

심의요청 금액	심의결과 금액	증 감
*************	*************	************

❍ 설계변경 현황                                                 [단위: 원]

구 분		공 사 비			비고
		당 초	변 경	증 감
도 급 비	총 차	*************	*************	************
	6 차	*************	*************	************

설계변경 세부내용

❍ 총차(6회) 변경                                               [단위: 원]

연번	공 종	내 용	공 사 비			비고
			당 초	변 경	증 감
*	*************		*************	*************	***********
***	******	****	***********	***********	*
***	******	*****************	***********	***********	*********
***	*******	****	***********	***********	*
***	********	****	***********	***********	*
***	*******	****	*********	*********	*
***	*****	*********************	***********	***********	***********
***	********	*****************	*	***********	***********
*****			*************	*************	***********
*******			***********	***********	**********
*****			***********	***********	*
****			*********	*********	*
****			*************	*************	***********
*****			***********	***********	**********
*******			*************	*************	***********
*****			***********	***********	*
*****			*	**********	**********
****			*************	*************	***********

❍ 6차(2회) 변경                                                [단위: 원]

연번	공 종	내 용	공 사 비			비고
			당 초	변 경	증 감
*	*************		***********	*************	***********
***	******	****	**********	**********	*
***	******	*****************	**********	**********	*********
***	*******	****	**********	**********	*
***	********	****	***********	***********	*
***	*******	****	*	*	*
***	*****	*********************	***********	***********	***********
***	********	*****************	*	***********	***********
*****			***********	*************	***********
*******			***********	***********	**********
****			*********	*********	*
****			***********	*************	***********
*****			**********	***********	**********
*******			*************	*************	***********
*****			***********	***********	*
*****			*	**********	**********
****			*************	*************	***********

건설사업관리기술자 검토의견

❍ 설계변경 자문회의(소위원회) 지적사항에 대한 조치내용을 검토한 결과 공사비 및 수량 증·감 등에 대하여 조정함이 타당하다고 사료되며, 설계변경계약 내역서를 검토한 결과 적정함

3		보고자 의견

검토결과 조치의견

❍ 건설사업관리기술자의 설계변경 기술검토의견 사항을 검토한 결과 검토의견이 적정한 것으로 판단되어 변경계약 시행하여 공정관리에 만전을 기하고자 함