“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행 (2020년 은평구 관내 상수도공사-2차)

우리사업소에서 시행중인 『2020년 은평구관내 상수도공사(장기계속단가계약)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(2차)을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2020년 은평구 관내 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 수 급 인 : ***********

다. 계약기간 : 2020. 6. 4. ~ 2021. 6. 30.

라. 계약금액(도급비)

1) 변경 내용

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증․감	주요공종
토 공	161,189,497	152,876,487	감 8,313,010	아스팔트포장깨기 등
부 설 공	171,441,996	161,005,788	감 10,436,208	스텐관부설공 (D=50mm)등
구조물공	20,912,123	25,514,530	증 4,602,407	대형계량기실 설치공 등
부 대 공	92,920,095	86,137,246	감 6,782,849	안전칸막이휀스 설치 및 철거 등
사급자재비	107,597,427	117,016,005	증 9,418,578	스텐레스관 (13mm) 등
부가세 및 요율	367,681,842	379,192,924	증 11,511,082	고용개선지원비
합 계	921,742,980	921,742,980	변동없음

2) 총공사비 변경내용 (변동없음)

(단위: 원)

구 분		당 초	변 경	비고(증․감)
합 계		921,742,980	921,742,980	-
도급비	계	921,742,980	921,742,980	-
	공급가액	837,948,164	837,948,164	-
	부 가 세	83,794,816	83,794,816	-
기타 및 복구비		-	-	-

마. 설계변경 사유 : 신규공종 발생 및 계약물량 증·감

바. 최대이행금액 : ******************

사. 예산과목

상수도사업비용, 영업비용, 급.배수공사비, 신설공사비(급수공사)

자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(노후상수도관(배급수관)정비)

재난시스템구축,소방용수시설등의 설치및관리,소방용수시설설치및보수비,시설비

상수도사업비용, 영업비용, 배급수비,지원사업성시설비(보호통보온재등정비)

자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(소블록 배급수관망 개선)

자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(유수장애)

상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 상하수도관교체비(교체장애수전정비)

상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비(배수관소블록 물세척)

상수도사업비용, 영업비용, 배급수비,지원사업성시설비(음수대)

상수도사업비용, 영업비용, 급.배수공사비, 개조공사비(상수도관이설)

상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비(불용관정비)

자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(간선배관공사) - 추가

붙임  1. 설계변경 심의결과 보고 1부.

2. 설계변경 요약서 1부

3. 변경내역서 1부.

4. 설계변경 심의결과서 1부.

5. 변경합의서 1부.  끝.

주무관	강철운		시설안전팀장	권영안		시설관리과장	代김용만		서부수도사업소장	12/22 이종주
협조자	주무관	구자람
시행	시설관리과-23174	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3691	/전송	3146-3739	/		/	부분공개(7)